《붙임2》소요산출 설명서

도림천고가교

(도시안전본부 교량안전과 김근섭 ☎2133-1974)

1. 시설물개요

○ 위    치 : 영등포구 문래동 ~도림동

○ 시설물종별(등급) : 1종 (B등급)

○ 준공년도 : 본선 및 램프E- 1992, 램프,C D,- 1993

2. 조치대상 현황

(단위 : 건)

구 분	시행년도	조치완료
		조치대상	보수․보강 완료	미조치
계		16	1	15
정밀안전진단	2013년	15	1	14
기술감사
시의원 요구
정기점검	2015년	1		1
정밀점검
정밀점검
내진성능개선계획

※ 작성요령

1) 진단․점검 지적사항 및 내진성능개선 등 전체 조치대상에 대해 작성

2) 2015년에 조치예정(일상유지 또는 단일사업)인 건수는 보수․보강 완료로 기재

3. 미조치사항 보수를 위한 년차별 소요예산

(금액단위 : 백만원)

구 분	계		2016년		2017년		2018년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	2	1,498	10	1,010	5	488	0	0
2013 정밀안전진단	14	1,220	9	732	5	488
2013 기술감사
2013 시의원 요구
2015 정기점검	1	278	1	278
2012 정밀점검
2010 정밀점검
2009 내진성능개선계획

4. 미조치사항 세부내용                               (단위 : 백만원)

연번	사업 내용	물량	소요예산	용역보고서 상 보수 우선순위	보수계획 연도	사업시행 우선순위(※)
			1,988
2013 정밀안전진단			1,710
1	교면포장	4,695㎡	564	1	2016	2-1
2	아스콘 균열 보수	2,064m	93	1	2016	2-1
3	미끄럼 방지 포장	134㎡	4	1	2016	2-1
4	균열주입보수(0.3mm)	126m	4	2	2016	3-1
5	방호벽 균열주입보수 (0.3mm)	416m	14	3	2017	3-1
6	받침장치, 하면 등 단면보수+철근방청	99㎡	32	2	2016	1-4
7	슬래브 하면, 방호울타리 등 단면보수+철근방청	157㎡	50	3	2017	1-4
8	신축이음장치교체	98m	295	2	2016	2-10
9	염해방지도막 재도장 등	221㎡	23	2	2016	3-2
10	거더 내외부 도장	2492㎡	260	3	2017	3-2
11	차수 죠인트 교체	10개소	10	2	2016	3-9
12	표면처리	1382㎡	111	3	2017	2-10
13	후타재 보수	216m	53	3	2017	2-10
14	공중비계(고소차 등)	1	197	1	2016	4-1
2015 정기점검			278
1	소음감쇠기 손상부 재설치 및 옹벽구간 등 정비	600m	278	1	2016	2-10

※ 사업시행 우선순위는 전체 조치대상에 대한 시행 우선순위 결정