검  토  의  견  서

관련문서

천호(G)-2018-265호(2018.10.10.)

검 토 자

책임건설사업관리기술자

정  하  설

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

제    목

실정보고(폭염에 의한 중앙버스전용차로소성변형 구간 긴급보수) 승인요청

□. 실정보고 사유

중앙버스전용차로 설치구간 중 버스정차구간(교차로 및 버스정차구간, 횡단보도구간)등이 금년 폭염으로 인해 공용중인 중앙버스전용차로(버스정차구간)에 소성변형이 발생되어 시민의 안전 및 운전자의 안전을 확보하기 위하여 긴급보수건을 검토코자 함.

□. 추진경위

날짜	제 목	주 요 내 용	관련 문서
‘17.11.14	중앙버스전용차로 공사 관련 자문회의	○중앙버스전용차로 설치공사 관련 포장 시공에 대하여 전문가 및 관계자 자문 회의 개최 * 참석자 :토목부, 교통운영과, 성동도로 사업소,기술심의위원, 설계사
‘17.11.17	중앙버스전용차로 공사 관련 자문회의 결과 통보	○중앙버스전용차로 설치공사 관련 포장 시공에 대한 자문회의 결과 통보	업무연락전- 도기본 -17-11085
‘18.05.01	중앙버스전용차로 개통	○중앙버스전용차로 L=2.6km, 정거장5개소 개통	업무연락전- 도기본 -18-3837
‘18.07~08	중앙버스전용차로 버스정차구간 소성변형 발생	○버스정차구간 폭염에 의한 소성변형 발생 - 폭염(35°이상): 18년 7월 → 9일 18년 8월 → 13일 최고기온 39.6°, 포장면온도 64~68℃	기상청 관측자료 첨부 1

□. 검토내용

□ 아스콘포장 소성변형 발생현황

구 분		시공 포장단면	소성변형 발생현황
중앙버스전용차로 버스정차구간	아차산 사거리	기존포장면 상단에 덧씌우기 5cm추가	러팅 : 3cm ∼ 5cm
	광장사거리	6cm 절삭 후 6cm 덧씌우기 포장	러팅 : 3cm ∼ 5cm
	중곡동입구삼거리	5cm 절삭 후 5cm 덧씌우기 포장	러팅 : 5cm ∼ 8cm

□ 버스정차구간 아스콘 소성변형

중곡동 입구 삼거리 횡단보도	아차산 사거리 중앙버스정류장

□ 버스정차구간 아스콘 소성변형 검토

구 분	변 경 내 용	비 고
버스정차구간 보수	○중앙버스전용차로 버스정차구간(정차, 출발, 감속)이 금년 폭염기간에 버스집중하중으로 인한 소성변형(러팅)발생 ○2018년 7월~8월 폭염(35°이상) 현황 - 18년 7월→9일 폭염지속, 18년 8월→13일 폭염지속 - 최고기온 39.6° - 폭염기간 아스콘 표면온도 : 64°~68° ○버스정차구간중 기존포장에 덧씌우기 포장을 실시한 구간 소성변형(러팅) 발생 ○버스정차구간중 폭염에 의하여 러팅이 발생한 구간에 대하여 천호대로 중앙버스전용차로 전구간 보수를 실시한 성동도로사업소의 보수공법과 동일 아스콘포장 공법으로 보수 실시

□ 버스정차구간 아스콘 포장보수 방법검토

구분	시 공	보 수
개 요 도
아스콘 포장	· 기층 : 기존포장단면 유지 · 표층 : 절삭후 덧씌우기(T=5cm)	· 기층 : 절삭후 재포장(T=20cm) · 표층 : 절삭후 재포장(T=5cm)

※ 천호대로 확장공사 중앙버스전용차로 전․후구간(성동도로사업소관리구간)도 폭염에 의한 소성변형이 발생하여 사업소에서 재포장을 실시하였음

□ 단가산출서 검토

구 분	주 요 내 용	비 고
기존품목	○해당없음

※ 천호대로(광나루역)확장공사 중앙버스전용차로 계약심사 단가 적용

관련근거 : 서울시 계약심사과 – 18837 _ 2017. 10. 20

□ 공사량 증·감 대비표

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
11.0	중앙버스전용차로
11.1	토공
	아스팔트노면절삭	T=25cm	m2	-	2,178	2,178
11.3	포장공
	개질아스콘포설및다짐-야간	T=5cm	a	-	21.78	21.78
	기층포설및다짐-야간	T=10cm	a	-	43.56	43.56
11.4	교통안전시설
	노면표시	도색,15cm	m	-	780	780
■	관급자재
	개질아스콘(PSMA)	표층용	ton	-	261	261
	아스콘	BB-2,기층용	ton	-	1,044	1,044
■	폐기물
	폐기물처리비	폐아스콘	m3	-	544	544

□ 공사비 증·감 대비표

[금액단위 : 천원]

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
11.00	중앙버스전용차로	-	28,847	28,847
11.10	토공	-	13,976	13,976
	아스팔트 노면절삭	-	13,976	13,976
11.30	포장공	-	8,949	8,949
	개질아스콘포설및다짐-야간	-	2,851	2,851
	기층포설 및 다짐-야간	-	6,098	6,098
11.40	교통안전시설	-	5,922	5,922
	노면표시	-	5,922	5,922
■	직접공사비	-	28,847	28,847
	간접공사비	-	9,827	9,827
■	도 급 액	-	38,674	38,674
	관급자재비	-	88,809	88,809
	폐기물 처리비	-	24,256	24,256
■	총 공 사 비	-	151,739	151,739

□. 검토의견
□ 상기 내용을 검토한 결과, 중앙버스전용차로 설치공사 관련 포장 시공에 대하여 전문가 및 관계자 자문회의 결과에 따라 표층구간만 절삭 후 덧씌우기를 실시 하였으나,
□ 금년(2018년 07~08월) 혹서기에 폭염이 지속됨에 따라 아스콘의 소성변형이 발생한 것으로 사료되어 시민의 안전 및 운전자의 안전을 확보하기 위하여 긴급 보수함이 적정하다고 판단됨.
검 토 자	천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역 책임건설사업관리기술자 정 하 설 (인)