	예산서 P.
미아구름다리 보수공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2017.03. ~ 2017.12.
사업위치	서울시 성북구 돈암1동 51-56
총사업비	총 300,000천원	[국비]	[시비] 300,000천원	(보조율) 0 %
사업내용	미아구름다리 보수(전체 재도장, 교면포장 등
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울특별시 북부도로사업소 시설보수과

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	☑
								유지관리
경상	투자
□	□

□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀 장	주무관
북부도로사업소	시설보수과	정재현		이택호
		944-5403		944-5458

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2015년 본예산	2016본예산 (A)		2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계						300,000	300,000
시설비						300,000	300,000
감리비

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2016년 본예산
시설비
감리비

과목구분	2017년 예산(안)
시설비	○	작업비계 설치 : 790㎡ × 66,600원/㎡	=	53,000천원
	○	청소(조류배설물) : 1식	=	6,250천원
	○	전체 재도장(외부) : 1,720㎡ × 70,200원/㎡	=	120.700천원
	○	균열보수 : 39m × 62,000원/m	=	2,400천원
	○	교면방수+재포장 : 5.50a × 13,000,000원/a	=	72,000천원
	○	단면보수 : 20㎡ × 351,000원/㎡	=	7,000천원
	○	후타재 단면보수 : 35㎡ × 560,000원/㎡	=	19,600천원
	○	표면보수 : 50㎡ × 69,000원/㎡	=	3,450천원
	○	재도장(거더내부 및 받침장치) : 30㎡ × 52,200원/㎡	=	1,600천원
	○	설계비	=	14,000천원
	○	총계(단가에 제경비 포함 산정)	=	300,000천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	신규

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계
설계비
보상비
시설비
감리비

3		사 업 설 명

□ 사업목적

○  장기 공용에 따른 도장, 포장 노후 등 시설물 결함사항을 보수하여 시설물 안전성 확보 및 내구성 증진

□ 사업근거

○  법령상 근거

- 시설물 안전관리에 관한 특별법 제15조(안전점검 및 정밀안전진단 결과 이행)

- 2016. 4. ~ 2016. 10. : 정밀점검용역

□ 사업내용

○  위    치 : 서울시 성북구 돈암1동 51-56

○  규    모 : 총 연장 46.0m, 폭원 15.5m(왕복 2차로)

○  사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 12.

○  사업내용 : 전체 재도장 1,720㎡, 교면방수 및 재포장 5.5a 등

○  총사업비 : 300백만원

□ 2017년도 사업계획(투자사업의 경우)

○ 해당없음

□ 추진경위

○ 2016. 4. ~ 2016. 10. : 정밀점검용역

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 장기 공용에 따른 시설물의 기능적, 물리적 손상을 보수하여 내구성 증대

□ 사업추진절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공금 지급

○  계약체결

- 실시설계 ⇒ 공사 계약심사 ⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 및 착수 ⇒ 공사 시행 ⇒ 공사완료

□  2017년도 추진일정

(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		300
공사 실시설계	2017.3. ~ 4.	14	실시설계
계약심의 및 발주	2017.5.	-	계약심의 및 발주
공사계약 및 착공	2017.5.	99	선급금 지급
공사시행	2017.5. ~ 11.	100	재도장, 교면포장 등
공사준공	2017.12.	87	공사준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	○ 방호울타리 기초 재설치(0.9m) ○ 시멘트 액체 방수(288.0㎡)
2015년도	○ 도심환경 개선을 위한 세척시행
2016년도	○ 도심환경 개선을 위한 세척시행

□   향후 기대효과

○  노후, 손상된 시설물을 적기 보수·보강으로 시설물의 내구연한 증대 및 시민생활 안전에 기여

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

참 고 자 료

▢ 위치도 및 전경사진

위 치 도
전 경 사 진
상 부	하 부