검    토   의   견

○ 사 업 명 : 서울제물포터널 민간투자사업 실시설계(전)

○ 검토구간 : 공동구 BOX 진동 및 침하영향 검토

검 토 의 견	비 고
○ 공동구인접 굴착예정구간 착공전 공동구 안전성 검토(계측계획포함) - 여의도공동구(M라인 600m~1,045m) : 종점출입램프 - 목동공동구(이대병원방향간선 550m~650m) : 목동 수직구
○ 여의도공동구 주변은 모래지반으로 공동구 안전을 고려 비굴착 검토 - 여의도공동구 주변 굴착구간 주상도 추가
○ 여의도공동구 인접 굴착시 추가검토 요청사항 - 공동구 답사하여 시공이음부 등을 조사하여 JSP 그라우팅 범위 결정 - 개착구간 노출공동구 구조체 보호 조치(철판보강 등) - (개착구간이외) 공사영향 범위내 공동구주변 지반보강 - JSP 지반보강시 오염수 공동구 내부유입 유의(오염방지방안 검토)
○ 복구시 추가검토 요청사항 - 공동구 받침 파일, 지지보 상세도 및 향후 처리 방안 - 노출 공동구 향후 복구시 시공계획서(방수 포함) 작성 - 향후 유지관리방안