<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사업명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리 용역	생산부장	구 자 훈 (인)
○ 공사기간 : 2016. 03. 08. ～ 2016. 12. 31.	생산관리과장	한 희 선 (인)
	작 성 자	직 시설7급 성명 신왕근(인)
	예산담당(생산부)	직 행정7급 성명 이경선(인)

○ 예산과목(사업코드 : 12103)

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비및부대비 (세목)감리비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
627,380	’16.01.	623,590	계		562,100		376,200		185,900 ( 0 )
			감 리 비		562,100		376,200		185,900
				도 급 비		562,100		376,200		185,900
				관 급 비				0		0
			보 상 비		0		0		0
			이전비․기타		0		0		0

○ 이월사유 (육하원칙에 의거 구체적으로 기술)

- 토목· 기계공사의 준공기간이 2015.11.27.∼2017.06.30.로 연장 됨에 따라 건설사업       관리 용역의 준공기간을 연장하고 준공기간(2016.03.08.∼2017.07.14.)에 맞추어        예산 이월

○ 착공연월일 : 2016. 03. 08.        ○ 최초준공연월일 : 2016. 12. 31.

○ 최종준공연월일 : 2017. 07. 14.

첨부 : 관급자재 구매액 일자별 현황 양식 1부. 끝.

관급자재 구매액 일자별 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리 용역

(단위 : 원)

일 자 별	구 매 액	비 고 (구매내용)
계
해당사항 없음 -