○ 주요 추가 공사 내용

공 종	규 격	단위	수량	비 고
차단기 설치	차량검지기(1회로용)	개	5
	차량검지기(2회로용)	개	2
	차량번호인식기(전광판 포함)	개	2
	UP/DOWN 스위치(주차관제)	개	4
	인터폰(외함 포함)	개	1
	LOOP COIL	개	9
	차량차단기(STS, 3m원형바)	개	4
	관리컴퓨터(PC,소프트웨어포함)	세트	1
	차량 차단기(기존) 철거	개	4
비상벨 설치	IP 비상벨	개	6
	IP EM 메인유닛	세트	2
	IP EM 서브유닛	개	1
	EM 시스템 서버	개	2
	EM 시스템 서버 프로그램	개	1
	스위치 허브(L2보안스위치)	개	2
	LED 모니터 22inch	대	4
	시스템 랙(19〃, H1,200)	대	1
	POLE STAND(기초포함)	개	2

○ 공사비 증감 내용

【단위 : 원】

구 분	당 초	변 경	증(▼)감
직접공사비	119,842,997	209,977,626	증)90,134,629
간접공사비	49,657,003	96,522,374	증)46,865,371
합 계	169,500,000	306,500,000	증)137,000,000