문서번호	생산관리과-16941
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	주무관
	주무관

『건설사업관리용역(뚝도정수센터 농축조 공사 )』

“용역기한 연장 및 계약금액 변경 실정보고” 검토 보고

2016.  12.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『건설사업관리용역(뚝도정수센터 농축조공사)』

“용역기한 연장 및 계약금액 변경 실정보고” 검토 보고

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리용역』 관련하여 건설사업관리책임기술자로부터 “용역기한 연장 및 계약금액 변경에 대한 실정보고”가 있어 이에대한 검토사항을 보고 드림

※ 건설사업관리용역 변경 실정보고(뚝도건 제16-83호, 2016.11.25.)

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.

❍ 계약금액 : 431,420,000원

❍ 계 약 자 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 용역대상 : 뚝도정수센터 농축조공사 토목, 기계, 전기 및 통신공사

Ⅱ		변경 사유

❍ 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)의 계약변경(공사기간 및 계약 금액)에 따른 건설사업관리 용역기간 및 기술자 투입계획을 변경하여 원활 한 건설사업관리용역 수행

❍ 뚝도정수센터 농축조공사(토목,기계) 설계변경(1회) 현황

구 분		공사기간		도 급 액(천원)
전체	당초	’15.11.27∼’16.11.26		3,448,907
	변경	’15.11.27∼’17.06.30	(증)7개월	3,673,791	(증)224,884
1 차	당초	’15.11.27∼’16.08.31		2,490,840
	변경	’15.11.27∼’16.12.31	(증)4개월	2,700,000	(증)209,160

Ⅲ		CM 보고내용

❍ 건설사업관리기술자 투입 계획 변경

(당초/변경)

※ 동절기 공사중지기간(59일)에는 공사현장관리, 잔업 등을 위한 토목기술자(1)만 투입

❍ 용역기간 변경

【당 초】 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.(10.0개월)

【변 경】 2016. 03. 08. ~ 2017. 07. 31.(16.8개월)

❍ 계약금액 변경

용역비 증.감 (천원)				비 고
항 목	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	392,200	557,100	164,900
부가가치세	39,220	55,710	16,490
도급금액	431,420	612,810	181,390

Ⅳ		검토 의견

❍ 건설사업관리용역 설계변경안 검토(안)

CM변경안 중 동절기 토목기술자(1) 투입일수를 2개월(상시 투입) → 0.5개월(간헐적 투입)으로 변경하여 현장 필요시에만 투입

기계 및 전기 기술자 투입일수를 당초 4개월 → 3.5개월로 변경 투입

구분	용역기간	기술자 배치계획			용역금액(천원)	증/감(천원)	비 고
당초	’16.03.08 ~’16.12.31 (10.0개월)	책임	10	개월	431,420
		기계	4	개월
		전기	4	개월
		토목	10	개월
CM 변경안	2016.03.08 ~’17.07.31 (16.8개월)	책임	14.8	개월	612,810	181,390	-동절기 2개월 (토목1명 상시 투입)
		기계	4	개월
		전기	4	개월			-기계/전기 각 4개월
		토목	16.8	개월
검토 변경안	2016.03.08 ~’17.07.14 (14.7개월)	책임	14.2	개월	562,100	130,680	-동절기 0.5개월 (토목1명 간헐적 투입)
		기계	3.5	개월
		전기	3.5	개월			-기계/전기 각 3.5개월
		토목	14.7	개월

❍ 상기 검토(안)과 같이 용역기한 연장 및 계약금액 변경코자 하며 건설 기술자 투입인원 및 적용 단가 등에 대하여 계약금액 조정 심의를 거쳐 설계변경에 반영조치 코자 합니다.

따로붙임 : 1. 건설사업관리용역 변경 실정보고 공문 1부.

2. 건설사업관리용역 설계변경 내역서 1부. 끝.