위례선 도시철도 건설사업

1-3. 주요 공사 추진현황

□ 현재까지 진행된 주요 공사내역(우선시공분 등)

○ ‘21.12.27 : 우선시공분 계약

(가설사무실 축조, 열배관 이설, 차량기지 가시설 및 터파기 등)

○ ‘21.12.30 : 우선시공분 착공(’21.12.30~‘22.12.24)

○ ‘22. 3~ 4.: 지장물(열배관로) 위탁기관 이설 협의

○ ‘22. 4.27 : 가설사무실 축조 완료

○ ‘22. 9. 5 : 지장물(도시가스관로) 이설 협의 완료

○ ‘22. 9.29 : 열배관로 이설작업 착수(이설중, 12월중 이설 완료 예정)

○ ‘22.11. 9 : 본선구간 세륜시설 설치

○ ‘22.11.16 : 우선시공분 변경계약(내역 변경)

(가설사무실, 열배관로 이설 등)

○ ‘22.11.16 : 차량기지 구간 세륜시설 설치

○ ‘22.11.28 : 사업계획 승인(국토부 대광위)

※ 개별 법(지하안전관리에 관한 특별법, 환경영향평가법)에 따라 사업계획승인전에 사전공사를 금지하고 있어 그간 굴착공사를 하지 못함