문서번호	서울역일대종합발전기획단-3207
결재일자	2015.12.13.
공개여부	비공개
방침번호

					시 민
★주무관	사업계획팀장	재생사업반장	서울역일대종합발전기획단장		안전총괄본부장
협 조	토목부장
	교량건설과장

「서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

2015.12.

안전총괄본부

(서울역일대종합발전기획단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

현재 설계용역 수행중인『서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계』에 대한 준공기한 연기에 대해 검토 보고 드림.

※ 준공기한 : 당초) 2015.12.27. →  변경) 2016. 01.27. (증 31일)

▢ 근    거 : 용역기간 변경 요청《도화(구조)-2015-A20-0137(‘15.12.10)》

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계

○ 위    치 : 중구 남대문로 5가 627~ 만리동1가 67

○ 용역내용 : 서울역고가 보행길 전환(B=10.3m, L=938m)

○ 용역기간 : 2015. 7. 1. ~ 2015. 12. 27.

○ 용 역 비 : 금1,886,290,000원(금일십팔억팔천육백이십구만원)

○ 용 역 사 : ㈜종합건축사사무소 디자인캠프문박 디엠피, MVRDV,

㈜삼안, ㈜한국종합기술

▢ 추진현황

○ '15. 7. 1   : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

○ '15. 9. 30  : 기본설계 완료

○ '15. 10. 21 : 경관심의(조건부)

○ '15. 10. 27 : 기본설계 건설기술심의(조건부)

○ '15.12. 현재 : 실시설계 중

▢ 보고내용

가. 용역비 및 용역기간 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용 역 비	1,886,290,000	1,886,290,000	-	변경없음
용역기간	'15. 7.1.~'15.12.27.	'15. 7.1.~'16. 1.27.	증)31일

나. 준공기한 연기 사유

○ 심의(문화재 현상변경 및 좋은빛위원회 등) 등 행정절차 이행에 따른 실시설계 과업 기간 부족

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 검토의견

○ 상기와 같이 본 용역의 설계감리를 수행하고 있는 ㈜도화엔지니어링으로부터 제출된 준공기한 연기 검토결과에 의거 설계 성과품 품질확보를 위하여 실시설계 용역 준공기한을 연기하여 용역수행에 만전을 기하고자 함.

▢ 향후계획

○ '15. 12. : 문화재 현상변경심의

○ '16.  1. : 좋은빛위원회 심의 및 실시설계 준공

붙임   1. 설계용역사 공문 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.