검  토  의  견  서

검토건명

2016년 사전공사 추진계획(안) 검토보고

공 사 명

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

확 인 자

홍 춘 선  (인)

검토기간

2016.01.08.

검 토 자

류    선  (인)

근거공문

하남한신 제700-355호(`16.01.08)

회신공문

Ⅰ. 공사추진 개요

1. 위    치 : 서울시 강동구 상일동역～서울외곽순환고속도로~동광교회 앞

2. 규    모 :

〇 본선 628.50m

- 본선개착 : 628.50m

- 고덕천교량(합성형라멘교) 2@27.50=55.0m

- 본선터널 : 112.85m

- 정 거 장 : 1개소, 168m[H1정거장]

- 부대시설 : 환기구 2개소

〇 입출고선 16.90m

3. 사업기간 : 2015.03.30. ~ 2019.03.28.

Ⅱ. 계약 및 준공현황

1. 계약금액(전체)  : 68,082,000,000원

2. 공사기간(전체)  : 2015.03.30~2019.03.28

3. 1차공사(2015년) : 2015.03.30~2015.12.31

4. 2차공사(2016년) : 발주 추진중(현재 미계약)

Ⅲ. 사전공사 추진내용

위 치	공사내용	비 고
본선1구간	- 시점부 하수강관 이설
정거장	- 가시설 및 차수그라우팅(좌측부) - 복공판 설치
환기구#2	- 가시설 및 차수그라우팅(좌측부) - 복공판 설치
지장물이설	- 가로등 이설

Ⅳ. 사전공사 추진공종 및 사유

- 본선 시점부의 하수강관이설 및 정거장․ 환기구#2의 가시설 설치와 가로등

이설작업 등

- 2015년 1차분 공사가 완료됨에 따라 공사의 연속성 확보, 효율적 인력관리

등을 위하여 미 계약된 2차공사 계약시까지 선공사 시행으로 공사추진

Ⅴ. 검토의견

- 지하철공사는 계속공사로 공사의 연속성, 효율적 인력 및 자재, 장비와 현장관리 측면(전력사용, 양수, 계측 등)에서 단절되지 않고 연속성 유지가 필요함

- 시공사 의견과 같이 향후 발주분인 2차공사 공종 중 전체 공정에 부합되도록 승인함이 타당할 것으로 사료되어 관련문서를 첨부하여 보고하오니 승인하여 주시길 바랍니다.

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

책임건설사업관리기술자   홍  춘  선   (인)