2016년 기능보강사업 계획변경 검토(금천구-청담)

2017년 금천구 청담종합사회복지관 기능보강사업 관련 계획 변경이 있어

검토하고 그 결과를 보고드림

□ 변경요청

◯ 사업명 : 주방식당 이설 개보수 공사

◯ 변경사항 : 자부담액(1,320천원) 추가에 따른 총사업비 변경

◌ 총사업비 : 64,180천원 → 65,500천원(1,320천원 증액액)

※ 사업비 내역 (단위 : 천원)

사업내용	당초 승인내역(변경전)				변경 요청사항
	총사업비	시비	구비	자부담	총사업비	시비	구비	자부담
주방식당 이설 공사	64,180	34,657	23,105	6,418	65,500	34,657	23,105	7,738

◯ 변경사유

- 초기 예산 산출시 내부공종에서 일부 제외된 소요자재 구입 등으로 공사금액 증가되었는데, 예산 추가분에 대해서는 자부담으로 처리하여 공사진행 요청

․ 기존 설치된 냉난반기 이설작업과 오배수관 매설 및 길이 연장에 따른 소요자재 금액 추가

․ 주방 출입구 방충망 설치 및 후문 출입구 강화도어 부분 보수 등에 따른 소요자재 금액 추가

□ 검토결과 : “승인”

◯ 승인내역 – 자부담액(1,320천원) 증가

사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
주방식당 이설공사	65,500	34,657	23,105	7,738

◯ 검토의견

- 최초 신청시 산출내역에 미포함된 설치 소요자재 구입 등으로 발생한 추가 금액에 대해 자부담으로 공사진행하는 것으로 확인되어 사업계획 승인함