계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 2019년 잠실야구장 환경개선공사

□ 사업개요

위 치	송파구 올림픽로 25
개 요	- 공사개요 노후철제 안전나간 교체 26개소, 노후관람석 좌판교체 내부복도 바닥재 교체, 관람석 통로 및 계단 바닥정비 등
기 간	착공일로부터 90일

□ 분야별 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,404,600	천원
◦ 심사금액 :	1,384,508	천원
◦ 절 감 액 :	20,092	천원
◦ 절 감 률 :	1.43	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 내수합판외 3개품목

◦ 일위대가 등 조정(※직접공사비 기준)

-  용접식난간 : 주자재 제작설치 적용 → 규격자재 제작설치 적용(△570천원)

-  난간철거 : 설치품의 50% 적용 → 설치품의 40% 적용(△1,128천원)

◦ 제경비 요율 조정

- 산업안전보건관리비 : 관급자관급 금액 제외(1,108천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음