계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 도곡근린공원 실내배드민턴장 건립공사(건축)

□ 사업개요

위 치	강남구 도곡동 204번지
공사개요	- 공사개요 · 규 모 : 지하1층 지상2층 987.99㎡ · 구 조 및 용도 : 철골,철근콘크리트조, 운동시설
공사기간	착수일로부터 8개월

□ 분야별 심사평가 결과

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총괄	1,586,104	1,502,934	83,170	5.2%
건축	1,307,584	1,269,701	37,883	2.9%
토목	185,317	146,327	38,990	21%
조경	93,203	86,906	6,297	6.8%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 도기질타일외 32품목

◦ 일위대가 조정

-  침투성방수 : 품셈적용  → 서울형품셈 적용(△ 1,598천원)

-  경량천정 철골틀 : 품셈적용 서울형품셈 적용(△ 1,817천원)

-  인조대리석 세면대 : 품셈오류 조정(△ 455천원)

․ 석공0.4472 → 위생공0.24

․ 보통인부0.364 → 보통인부0.094

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재비는 심사제외

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 도곡근린공원 실내배드민턴장 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	강남구 도곡동 204번지
공사개요	- 공사개요 · 규 모 : 지하1층 지상2층 987.99㎡ · 가시설토공, 가시설공, 가시설운반, 가시설자재, 토공, 우수공
공사기간	착수일로부터 8개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	185,317	천원
◦	심사금액	:	146,327	천원
◦	절 감 액	:	38,990	천원
◦	절 감 률	:	21.0	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 산소 : 2.16 원/ℓ → 1.83원/ℓ 등

◦ 일위대가 조정

- 토사굴착 : 장비효율 조정

- 토사운반 : 덤프트럭 규격(15톤→24톤) 및 운반거리 등 조정

- 케이싱튜브 설치철거 : 제외

- 토사, 풍화암 등 천공 : 표준품셈 5-6-1 적용

- H말뚝박기 : 표준품셈8-35 적용

- 띠장설치및철거, 버팀보설치철거 : 크레인 규격 조정(25톤→10톤)

- 띠장우각부연결, 사보강재제작 : 강재 고재처리

- 강판구멍뚫기, 볼트조이기풀기 : 서울형 개선품 적용

- 스티프너 : 표준품셈5-2-1 적용

- 파일철거 : 표준품셈8-35 적용

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 도곡근린공원 실내배드민턴장 건립 건축공사(조경)

□ 사업개요

위 치	강남구 도곡동 204번지 일대(도곡근린공원)
공사개요	- 수목식재, 플랜터 설치, 목재데크, 포장공사 등
공사기간	착공일로부터 240일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	93,203	천원
◦ 심사금액 :	86,906	천원
◦ 절 감 액 :	6,297	천원
◦ 절 감 률 :	6.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 마사토 등 5종 품목

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

◦ 일위대가 등 조정

- 투수블록 포장 : 견적품 → 표준품셈 적용 [감515천원]

- 가림막 등 : 목재가공조립(보통) →  목구조체 설치(간단) [감334천원]

- 연식의자(각관 등) : 잡철물제작설치 → 경량형강철골조조립설치 [감740천원]

- 가림막, 연식의자 : 앵커볼트설치(Φ13~16mm) → 앵커볼트설치(Φ12mm 이하) [감417천원]

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재비는 심사제외