2016년 기능보강사업 사업변경 검토(가락,청담,봉천)

1. 송파구 가락종합사회복지관

□ 사업변경내역

◌ 변경내역 : 석면텍스 제거사업을 방염 실크벽지 시공으로 변경요청

(단위:천원)

변경전					변경후
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
지하 대강당 1)석면텍스제거 2)LDE조명교체 3)강당환경개선	21,710	9,770	9,770	2,170	지하 대강당 1)방염실크벽지시공 2)강당환경개선	19,840	8,928	8,928	1,984
◎ 변경사유 - 석면텍스 제거 공사의 비용 증가로 공사 진행의 어려움 - 서울시(환경정책과) LED 조명교체 지원사업 실시로 인한 기능보강 사업량 및 소요예산 절감 - 석면텍스 제거 공사를 방염실크벽지 시공으로 사업을 변경하여 석면의 영향을 완화하는 방안 검토

□ 검토결과 : “사업변경 불가, 재견적(붙임3)으로 사업승인”

- 서울시복지재단 타당성검토 완료

○ 승인내역

(단위:천원)

내 용	사업비 내역				비고
	계	시비	구비	자부담
사업비	19,980	8,991	8,991	1,998

○ 검토의견

- 대강당이 어린이부터 어르신까지 노약자가 많이 이용하는 장소이고 지하에 있어 환기나 습기 등에 더욱 취약한 환경인 것을 감안하여 석면철거 및 제거가 최우선되어야 하는 중요 사안임

- 시설과 협의하여 이용자 및 종사자의 안전을 최우선하여 석면텍스 철거를 포함한 사업내용으로 재견적 받음. (붙임 3) ※ 하기 재견적 내역

1) 지하대강당의 천장텍스 철거공사금액은 석면해체작업을 반영하고 기존의 LED 조명을 존치(석면해체작업의 추가비용을 LED조명 교체금액으로 충당)

2) 이용자 및 종사자의 안전과 편의를 위하여 벽면 도배 및 라디에이터 그릴 커버 교체

3) 외부에서도 유관으로 확인 가능한 강화유리도어로 교체

- 재견적에 따라 ’16년 기능보강사업 최초 신청 당시의 사업목적 및 필요성인 ‘지하대강당 석면제거, 강당환경개선’과 부합하는 사업내용이며 견적금액도 적절한 것으로 판단되어 지원 의견임.

2. 금천구 청담종합사회복지관

□ 사업변경내역

◌ 변경내역 : 교육용 컴퓨터 교체(본체8대, 모니터8대 → 본체15대)

(단위:천원)

변경전					변경후
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
교육용 컴퓨터, 모니터 교체 (본체8대,모니터8대)	9,744	5,261	3,508	975	교육용 컴퓨터 교체 (본체15대)	10,800	5,261	3,508	2,031
◎ 변경사유 - 당초 신청한 금액 (26,048천원 본체16대, 모니터16대) 대비 승인금액 (9,744천원, 본체8대, 모니터8대) 감소에 따른 구매물품 및 금액조정 - 현재 총 16대 컴퓨터를 보유한 상황에서 기승인된 예산에 따라 컴퓨터 8대를 교체할 경우 미 교체되는 컴퓨터가 발생하므로 본체 종류를 변경하고, 자부담액을 추가 충당하여 강사용 컴퓨터(1대)를 제외한 교육용 컴퓨터 본체 15대를 모두 교체하고자 함.

□ 검토결과 : “승인” - 서울시복지재단 타당성검토 완료

○ 승인내역

(단위:천원)

내 용	사업비 내역				비고
	계	시비	구비	자부담
사업비	10,800	5,261	3,508	2,031

○ 검토의견

- 본체를 보다 저렴한 제품으로 컴퓨터 교육장의 교육용 컴퓨터 전부를 교체하는 내용이며, 예산 절감 및 초과되는 비용은 자부담을 통해 많은 대수의 본체 구입

- 사업변경 취지가 인정되고, 금액이 적정하다 판단되어 승인 의견임.

3. 관악구 봉천종합사회복지관

□ 사업변경내역

◌ 변경내역 : 재견적에 따른 사업비 감액 (사업내용 변경 없음)

◌ 총사업비 : 33,552천원(1,318천원 감액)

(단위:천원)

변경전					변경후
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
자동제어 전기설비교체 (MCC)	34,870	18,830	12,553	3,487	자동제어 전기설비교체 (MCC)	33,552	18,118	12,079	3,355
◎ 변경사유 - 사업 내용 변경없이 타회사에서 재견적받은 총사업비가 감액됨

□ 검토결과 : “승인” - 서울시복지재단 타당성검토 완료

○ 승인내역

(단위:천원)

내 용	사업비 내역				비고
	계	시비	구비	자부담
사업비	33,552	18,118	12,079	3,355

○ 검토의견

- 사업 내역의 변경이 없고

- 검토결과 현재(’16. 4)와 ’15. 8의 개별단가의 증감은 있으나 사업목적 달성을 위한 실행내역 및 금액은 적정하다고 판단되어 승인 의견임.