《 공 사 설 명 서 》

1. 공 사 명 : 2020년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

2. 공사목적 : 노후불량 공공 하수시설물을 적기에 보수 · 개량하여 주민생활 불편해소 및 수해 등 재난을 사전에 예방코자 함.

3. 공사위치 : 성북구 관내 11개동

(성북동, 삼선동, 동선동, 돈암1․2동, 정릉1․2․3․4동, 길음1․2동)

4. 공사개요

- 하수관 개량(D=250~800mm) : L=1,570m

- 맨홀신설 및 개량(1호~2호) : N=65개소

- 빗물받이(1호~2호), 횡단하수거(1~6m) 신설 및 개량 : 119개소

5. 공사기간 : 착공일로부터 2020.12.31.

6. 설계변경조건

- 다음과 같은 경우 설계변경을 할 수 있다.

가. 물량 변경이 있을 때

나. 설계도서와 현장이 상이 할 때

다. 기타 감독관이 필요하다고 인정될 때

라. 설계변경조건의 차이가 있을 때에는 발주부서의 유권해석에 준 한다

7. 준공기한 변경

- 다음의 경우에는 본 공사의 준공기한을 변경할 수 있다.

가. 공사시행 중 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 하였을 경우

나. 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

다. 지장물의 철거 이설 등으로 공사 진행에 현저한 지장이 있을 때

라. 주민의 민원발생으로 공사가 중단될 경우

8. 예정공정표

공 종	수량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
토 공	1 식
관 로 공	1 식
구조물공	1 식
포 장 공	1 식
부대공 등	1 식

9. 서울시 공사 인증제 시행

- 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행 시 이수증을 소지하여야 한다.

- 보도포장 품질관리자 1인(품질관리자가 없는 현장은 현장 참여기술자중 1인) 및 포장 기능공 전원은 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야 하고, 공사 시행시 이수증을 소지 하여야 한다.

- 서울시 도로 포장공사(포장공종이 필요한 사업 포함)에 참여하는 시공사의 현장대리인 및 장비운전자(아스팔트휘니샤, 롤러 등)는 『아스팔트포장공사계약특수조건 제4조(포장교육이수제)』에 근거하여 서울시에서 인정하는 포장교육〔건설기술연구원 ‘도로포장 기술직무교육과정’인 『포장시공(감리)전문화 교육(현장대리인, 감리원 등)』, 『포장 기능원(시공장비운전원)교육』과정〕을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야 하고 공사 참여시 이수증을 소지하여야 한다

※ 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 4개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

10. 현장근로자 실명제 시행

당 공사현장 근로자에게는 소속 회사명과 이름이 새겨진 안전조끼 및 안전장구를 착용토록 하여 근로자의 안전을 보호하고, 책임감 있고 친절한 언행으로 구민고객 중심의 공사실행으로 구정에 대한 신뢰성 향상을 위하여 건설현장 근로자 실명제를 의무적으로 시행하여야 한다.

11. 일자리 창출

본 공사에 투입되는 인력중 성북구민 중에서 고용을 희망하는자 2인 이상을 의무 고용 하여야 한다.

12. 안전조치

- 수급인은 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 수급인 부담으로 하고 감독관에게 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사 사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

- 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

- 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호 시설을 설치하여야 한다.

- 토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 건축물의 파손 등 기타 공정 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 우려가 있는 사항을 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.

13. 공사시행 및 작업완료 보고

수급인은 발주청의 작업지시가 있을 경우, 작업 대상지에 대한 상세 시공 계획 및 도면을 작성하여 공사를 시행하여야 하며, 작업 지시 기간 내 공사를 완료하고   시공 상황을 실측 한 도면과 공사 전, 중, 후 사진을 첨부하여 작업완료보고서를 감독관 경유하여 제출하여야 한다.

14. 수급인의 의무

- 모든 공사는 시방서와 설계도서에 부합되도록 하여야 하며, 수급인은 기술적인 사항을 완전히 숙지하고 공사를 시행하여야 한다.

- 시공시 손상을 받은 공사 부분이나 표준 이하로 시공된 부분은 시방서와 설계도서에 부합되도록 수급인이 부담하여 대치 또는 복구하여야 한다.

- 수급인은 법령에 의해 배치한 현장대리인을 감독관의 승인 없이 임의로 현장을 이탈시켜서는 아니 된다.

15. 기타사항

단가 계약된 물량은 추정 물량이므로 증ㆍ감 될 수 있으며, 산업안전보건 관리비는  1회 독립된 장소의 건별 공사금액이 4천만원 이상 일 경우 적용 정산한다.