- 2016년도 종합사회복지관 기능보강사업 -

변경에 따른 검토의견서(자치구)

1. 시 설 명 : 가락종합사회복지관

2. 소 재 지 : 송파구 양재대로 897(가락1동)

3. 대 표 자 : 김양선

4. 사업변경내용

▢ 기능보강사업내용 변경에 따른 예산 변경(감액)

▢ 사업 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업내역	기 존			변 경(안)			증 감
	예 산	내 용		예 산	내 용
석면 텍스 제거 및 강당 환경개선	21,710	시비	9,770	19,840	시비	8,928	△1,870
		구비	9,770		구비	8,928

5. 사업변경 필요성

▢  변경사유

- 2015년 기능보강사업 신청 후, 사업 결정 기간 동안 서울시(환경정책과) LED 조명 교체 지원사업 실시로 인한 기능보강사업량 및 소요예산 절감

- 석면텍스제거 대신 석면텍스 방염 실크벽지 시공으로 사업내용 변경, 예산절감

6. 우리구 검토의견

▢ 사업량의 축소, 사업내용의 변경 등으로 예산절감한 사항에 해당하므로 사업변경을 승인하는 것이 타당할 것으로 사료됨

7. 기대효과

▢ 지하대강당 개보수를 통한 시설 이용자에게 쾌적한 환경 제공

2016. 4.

송 파 구 청 장