도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제2차)

◉ 남구로역 승강편의시설 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사차량 진출입구간을 명시하기 바람.

- 구로동측 접근로에 공사 중 직진 1개 차로로 운영됨을 사전에 인지할 수 있도록 안내시설을 보완하기 바람.

- 2단계의 경우 21개월간 장기간 계속해서 하위 1개차로를 점용하는 것으로 계획하였는데, 작업 공정 및 공종을 세분화하여 차로 점용이 꼭 필요한 시기와 복공판 설치후 공사하여 차로 점용이 필요하지 않은 단계를 구분하여 차로의 점용기간을 최소화 할 수 있는 방안 강구

- 복공판 설치후 하부 공사시 장비 및 물자 반입 반출은 야간에 하도록 유도하여 주간에는 기본 차로수를 확보하는 등 공사로 인한 주변 교통영향을 최소화 하도록 공사방법과 공종 등을 재검토 바람

- 가마산로 등으로 원거리 우회할 수 있는 사전 안내표지 추가 설치

- 1단계 기존계단 철거/복구로 인해 계단 이용 불가 및 우회동선 안내와 관련하여 주민대상 사전 홍보 실시 및 우회보행로 안내 표지판 등 홍보 관련 계획 보완

- 2단계 보행통로에 대한 야간 조명 강화 등 보행안전시설 및 방법 시설 설치 검토

- 2단계 차량 통제수가 사고위험에 노출되지 않도록 적절한 위치 배치