건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사(전체 5회, 3차 1회) 설계변경 요청 건 검토
공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	검토구분	설계변경 검토보고
검토기간	2018. 04. 12. ~ 04. 16.	회신공문
근거공문	한개 제2018 – 109호(2018. 04. 12.)

□ 개   요

「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사」와 관련  전체(총괄) 5회 및 3차분 1회 설계변경에

대하여 변경설계도서의 적정성을 검토함.

□ 검토목적

○ 설계변경 검토목적

- 본 공사와 관련, 실정보고(여건변경) 승인 사항에 대한 설계변경 적정성을 검토.

- 3차공사의 실 시공 공사량 조정 타당성 및 실정보고의 반영 적정성 검토.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 규    모 : 닐센아치교(B=4.5M, L=191M)              - 당    초

닐센아치교(B=4.5M, L=251M)              - 변    경

교각5기, E/V 3기, 계단 4개소, 부대공 1식  - 당    초

교각7기, E/V 3기, 계단 4개소, 부대공 1식  - 변    경

○ 도 급 비 : 전체 6,455백만원(3차:    1,815백만원)      - 당    초

전체 8,084백만원(3차:    3,444백만원)      - 변    경

○ 공사기간 : 전체 2016.04.29. ~ 2018.04.28.(730일)      - 당    초

전체 2016.04.29. ~ 2018.11.30.(946일)      - 변    경

○ 시 공 사 : 한양산업개발(주)

○ 감 리 자 : (주)대한콘설탄트, ㈜한맥

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(5회) 및 3차분(1회) 설계변경 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비고
전 체 (5회)	도 급 액	6,454,822	8,084,230	증) 1,629,408
	공사기간	2016.04.29. ~ 2018.04.28.	2016.04.29. ~ 2018.11.30.	변경	216일 연장
3 차 (1회)	도 급 액	1,814,700	3,444,108	증) 1,629,408
	공사기간	2018.01.22. ~ 2018.04.28.	2018.01.22. ~ 2018.11.30.	변경	216일 연장

○ 설계변경 사유

- 전체5회 설계변경 사유                                            (단위 : 천원)

NO	변 경 내 용	공 사 비		증·감	관 련 문 서
		당초	변경
1	▷ 월계역사 연장 변경 설치	-	1,629,408	증 1,629,408	계약심사과-3929 (‘18.03.05)
도 급 비		6,217,686	7,829,837	증 1,612,151
정기안전점검		42,020	42,020	-
시공상세도작성		15,116	15,116	-
설계용역비		180,000	180,000	-
수탁안전점검비			17,257	증 17,257
합 계		6,454,822	8,084,230	증 1,629,408

- 3차공사 1회 설계변경 사유                                       (단위 : 천원)

NO	변 경 내 용	공 사 비		증·감	관 련 문 서
		당초	변경
1	▷ 월계역사 연장 변경 설치	-	1,629,408	증 1,629,408	계약심사과-3929 (‘18.03.05)
도 급 비		1,767,904	3,380,055	증 1,612,151
정기안전점검		31,680	31,680	-
시공상세도작성		15,116	15,116	-
수탁안전점검비			17,257	증 17,257
합 계		1,814,700	3,444,108	증 1,629,408

○ 설계변경 주요내용

- 당초 본선 주요 변경내용(전체 5회, 3차 1회) - 없음

공 종		단위	전 체			금 회(3차)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
1.토공	터파기	㎥	1,779	1,779	-	-	-	-
	되메우기 및 다짐	㎥	1,193	1,193	-	-	-	-
	사토운반	㎥	459	459	-	459	459	-
	사석채움	㎥	1,308	1,308	-	1,308	1,308	-
2.교량공	강교제작(본선부)	TON	161.357	161.357	-	-	-	-
	강교제작(아치부)	TON	105.868	105.868	-	-	-	-
	강교제작(접속부)	TON	117.263	117.263	-	-	-	-
	강교제작(계단부)	TON	56.129	56.129	-	56.129	56.129	-
	콘크리트타설	㎥	995	995	-	11	11	-
	거푸집	㎡	1,208	1,208	-	31	31	-
	강관비계	㎥	1,368	1,368	-	-	-	-
	철근가공 및 조립	TON	126.949	126.949	-	-	-	-
3.부대공	엘리베이터 설치	개소	3	3	-	3	3	-
	투석방지망	m	214	214	-	214	214	-
	교량배수시설	m	34	34	-	34	34	-
	가도 쌓기	㎥	1,690	1,690	-	338	338	-
	난간설치	m	562	562	-	562	562	-
	마대쌓기 및 헐기	개	2,357	2,357	-	2,357	2,357	-

- 월계역사 추가 주요내용(전체 5회, 3차 1회)

공 종		단위	전 체			금 회(3차)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
1.배수공	터파기	㎥	-	136	136	-	136	136
	되메우기 및 다짐	㎥	-	100	100	-	100	100
	흄관 부설 및 접합	m	-	47	47	-	47	47
2.포장공	보조기층 포설	㎡	-	64	64	-	64	64
	아스팔트 포설	a	-	3	3	-	3	3
	아스팔트 절단	m	-	148	148	-	148	148
3.부대공	차선도색	㎡	-	22	22	-	22	22
	신호수	일	-	100	100	-	100	100
	안전휀스설치	m	-	40	40	-	40	40
	사토운반	㎥	-	102	102	-	102	102
	폐기물 처리	ton	-	259	259	-	259	259
4.구조물공	강교제작	ton	-	46.141	46.141	-	46.141	46.141
	터파기	㎥	-	234	234	-	234	234
	되메우기 및 다짐	㎥	-	116	116	-	116	116
	콘크리트 타설	㎥	-	179	179	-	179	179
	거푸집	㎡	-	434	434	-	434	434
	철근가공조립	ton	-	25	25	-	25	25
	강관말뚝	m	-	171	171	-	171	171
	마이크로파일	m	-	177	177	-	177	177
5.부대공	콘크리트 깨기	㎥	-	70	70	-	70	70
	콘크리트 천공	m	-	122	122	-	122	122
	수목이식	주	-	70	70	-	70	70
6.건축공사	월계역사 연결	식	-	1	1	-	1	1

○ 설계변경 현황

- 전체분(5회) 금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 토 공	식	46,551,590	46,551,590
2. 교 량 공	식	2,942,018,189	2,942,018,189
3. 부 대 공	식	1,175,519,009	1,175,519,009
4. 사급자재비	식	117,565,104	117,565,104
5. 월계역사연장공사	식	-	1,105,846,972	증 1,105,846,972	계약심사1건 (월계역사 연장공사)
직접공사비		4,281,653,892	5,387,500,864	증 1,105,846,972
간접공사비		1,370,787,744	1,730,532,590	증 359,744,846
정기안전점검		38,200,000	38,200,000	-
시공상세도작성비		13,742,000	13,742,000	-
설계용역비		163,636,364	163,636,364	-
수탁안전점검비		-	15,688,182	증 15,688,182
부가가치세		586,802,000	734,930,000	증 148,128,000
도 급 비		6,454,822,000	8,084,230,000	증 1,629,408,000

- 3차분(1회) 금액 변경 현황                                         (단위 : 원)

구 분	단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 토 공	식	20,712,680	20,712,680
2. 교 량 공	식	850,453,730	850,453,730
3. 부 대 공	식	286,104,992	286,104,992
4. 사급자재비	식	1,021,021	1,021,021
5. 월계역사연장공사	식		1,105,846,972	증 1,105,846,972
직접공사비		1,158,292,423	2,264,139,395	증 1,105,846,972
간접공사비		448,892,849	808,637,695	증 359,744,846
정기안전점검		28,800,000	28,800,000
설계용역비		13,742,000	13,742,000
수탁안전점검비			15,688,182	증 15,688,182
부가가치세		164,972,728	313,100,728	증 148,128,000
도 급 비		1,814,700,000	3,444,108,000	증 1,629,408,000

□ 검토결과

- 상기와 같이 공사 설계변경(전체 5회변경, 3차 1회변경)에 대하여 검토 결과,

월계역사 연장설계의 계약심사 결과에 따라 변경설계도서의 수량산출 및 단가적용과

공사비가 적정하게 반영되어, 기존 설계수량을 조정함이 타당하다고 사료됨.

검 토 자	소속 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업관리용역 책임기술자 오 세 영 (인)