삼청각 일화당 등 시설보수 변경계획(안)

시설보수 변경(안)

○ 사업기간

- 당초 : ’17년 1월 ~ ’17년 10월

- 변경 : ’17년 1월 ~ ’18년 4월 ※ 공사기간: ‘18.1.～ 3.(3개월)

○ 사 업 비 : 1,257백만원

○ 공사범위 : 일화당(지상2층～지하2층) 및 별채 5동(유하정, 청천당, 천추당, 취한당, 동백헌) 등

○ 주요내용 : 삼청각 노후시설 보수공사

- 일화당 :  주방(메인주방 등 4개소) 개보수, 창호 교체, 설비 배관 및 장비 교체, 연회장등 내부 마감재(바닥재 등) 교체 , 무대장비 교체, 냉난방기 교체, 승강기(인승용, 화물용, 장애인용) 교체 보수 등

- 별 채  : 천정형 냉난방기, 보일러 교체

- 외  부 : 외부 CCTV 교체 및 선로보수 등

○ 사 업 비 : 1,257,244원  ※ 설계비 및 감리비 포함

(단위: 천원)

공 사 명	당초	변경		변경(안)
		증가	감소
계	1,257,244	532,536	532,536	1,257,244
일화당,별채 기와 담장 보수공사	316,882	-	316,882	0
경사로 스노우멜팅 공사	211,860	-	211,860	0
일화당 개보수 공사	636,869	-	3,794	633,075
놀이마당 잔디보식 공사	19,500	-	-	19,500
장애인리프트 교체	39,000	-	-	39,000
CCTV 추가 및 선로보수	33,133	-	-	33,133
시스템 냉난방기 교체		151,620	-	151,620
별채 보일러 교체		7,200	-	7,200
승강기(인승용, 화물용)교체보수		200,000	-	200,000
무대장치 보수		94,700	-	94,700
간접비 등 제경비		79,016	-	79,016

공사범위 및 세부내역

시설명	공 사 범 위	세 부 내 역
일화당	주방 보수공사	○ 천정개방 (배기덕트, 전기, 설비배관) 등 철거 및 설치 ○ 주방바닥 공사(트렌치, 타일, 방수 작업등) ※주방 4개소: 메인주방, 한식당, 다원, 직원식당 ○ 냉동․냉장시설 철거 및 교체
	2층 마감재 교체공사	○ 연회장(복도) 벽면 마감재 교체 ○ 연회장 내부 및 복도 바닥재 교체
	창호 교체	○ 출입문 및 창호교체 - 한식당(1층), 사무실(지하1층), 다원(2층) ※ 단창에서 2중창으로 교체
	설비배관 보수	○ 기계실 설비장비 교체 및 배관 보수
	승강기 교체 보수	○ 인승용, 화물용 승강기 보수 및 교체
	무대장치 교체	○ 무대 노후 장비교체(무대정밀안전진단 결과 반영)
	냉난방기 교체	○ 연회장, 업장, 주방, 직원 공간 등
별 채	냉난방기 교체	○ 별채 5개소 천정형 냉난방기 교체
	별채 개별 보일러 교체	○ 별채 5개소 개별 보일러 교체
외 부	놀이마당 보수	○ 목재 간이무대 철거 ○ 놀이마당 목재바닥 철거 후 잔디 보식
	장애인리프트 교체 설치	○ 장애인리프트 교체 설치 ※법정점검 결과 ‘불합격 판정’
	CCTV 설치 및 선로개선 공사	○ 방재 및 외부침입 감시용 CCTV 교체 및 선로 보수

추진일정

○ 민간위탁사업 계약 연장 : ’17.12.29

○ 실시설계 및 공사업체 선정: ’13.1.31

○ 삼청각 보수 공사 및 준공 : ’18.2 ～ 3

○ 민간위탁사업 결과보고 : ’18. 4.

시설보수공사 전문인력 파견

○ 파견부서 : 시설운영팀

○ 파견인원 : 1명(공사담당)

○ 파견일정 : ’18.1.1 ～ 3.31.

○ 협조사항 : 시설운영팀 인력파견 및 경영지원팀 인사발령

협조사항 : 방침 수립 후 서울시(박물관과) 승인 요청