도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(6차)

◉ 공사명 : 석촌역~가락시장사거리간 송배수관부설공사 외 1건

1. 송파대로구간은 신천빗물펌프장 유입관거 개량공사와 공사중복여부 확인하고 중복시 공사가 중복되지 않도록 공사시기 조정 바람.

2. 공통사항

- 보고서 전체 공사제원(점유폭원) 표시를 정확하게 할 것.

- P-4 시공순서상 포장걷기~가포장까지 당일굴착~당일복구작업을 1일 20m 씩 야간공사로 시행이 가능한지 재검토후 공사중 교통소통대책수립 보완하기 바람

- P-6 교통소통대책에 관한 요약(표)중 점용시간에서 송파대로 주간작업을 야간 (23:00~06:00)으로 수정 바람.

- 매 단계별 작업시 시작부 테이퍼구간 길이를 충분히 확보하고 안전지대 식  별이 용이하도록 경광등 추가설치 바람.

- 굴착, 자재운반시 등 장비회전반경이 점유폭을 초과하여 안전사고 발생이  우려되므로 장비가 점유폭을 초과하지 않도록 하고 부득이한 경우 안전지  대 추가확보, 안전감시원 추가배치 등 안전사고 예방조치하기 바람.