설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사

2. 도 급 자 : (주)희상리인포스  대표 노광근

3. 공사기간 : 2018.10.01 ~ 2018.12.31

4. 공사금액 : 285,558,000원

4. 설계변경 사유

- 시공물량 증ㆍ감

5.  주요 변경내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
FRP SHEET철거		㎡	1,556.1	1,551.2	감) 4.90
콘크리트 단면제거		㎥	20.8	0.1	감) 20.70
바탕처리		㎡	1,254.6	1,549.2	증) 294.60
철근노출 단면복구	HWD,T=30mm,천정	㎡	301.5	2.0	감) 299.50
표면보수(건조경화형)	HWA,바닥,2mm	㎡	346.2	345.5	감) 0.70
표면보수(건조경화형)	HWA,벽체,2mm	㎡	535.4	535.3	감) 0.10
표면보수(건조경화형)	HWA,천정,2mm	㎡	674.6	670.4	감) 4.20

끝.