공사현장 실정보고서(1회) 검토내용

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 여의도공원 산책로 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 10. 20 ~ 2017. 12. 18

다. 도 급 비 : 금118,482,400원 (관급비 466,877,490원 별도)

라. 도 급 자 : (주)세웅씨에스 대표 최여송

2. 검토내용

구 분	현황 및 문제점	검토결과	비고
철거 및 시설물	▶ 공사현장 철거공사가 현장과 상이 - 산책로 우레탄포장 기층 철거에 아스팔트포장 절단이 설계 미반영 - 농구장 우레탄포장을 철거하였으나 콘크리트 기층에 심한 요철 발생 - 농구장 포장경계석은 상태양호로 철거 불필요	▶ 현장여건에 맞게 철거 세부공종 을 반영하고 시설물은 공종 및 물량 조정 - 아스팔트 포장절단(산책1차로) 0 → 5,000m - 콘크리트면 절삭(B0.6, T1㎝) 0 → 6.08a - 포장경계석철거(100*100) 102m → 0 - 포장경계석설치(100*100) 102m → 0
부대공	▶ 공사안내간판이 미반영 되어 공사안내 홍보 및 이용객 안전(통제) 미흡	▶ 공사안내간판을 내역에 반영하여 이용객 통제 및 안전 도모 - 공사안내간판(900*1800) 0 → 2개소
관급 자재	▶ 상기 포장경계석설치 공종제외로 관급조정	▶ 도급자 관급자재 조정 - 화강석경계석(100*100) 105개 → 0 (조달수수료 포함)

※ 상기내용은 개략적인 물량과 금액이며 시공 시 현장상황에 따른 일부 경미한

변경사항은 설계변경 시 반영

3. 개략공사비                                          (단위 : 천원)

구 분	금 액			비고
	당초	변경	증감
총공사비	585,359	601,615	16,256
공급가액	107,711	123,101	15,390
부가세	10,771	12,310	1,539
도급비계	118,482	135,411	16,929
관급비	466,877	466,204	△ 673

4. 조치계획

상기내용에 대하여 발주청의 승인을 득하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 개략공사비 세부내역(변경내역서) 1부.  끝.