용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 2019년 독산배수지외 8개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

2. 용역위치

- 독산배수지외 8개소(서울특별시 관악구, 금천구 관내)

3. 용역개요

구 분		용 량	준공연도	시설개요	비고
정밀안전 진단	독산배수지	22,000㎥	1982년	철근콘크리트구조물 : 2지
	낙성대배수지	60,000㎥	1990년	철근콘크리트 구조물 : 4지
	신림9배수지	2,000㎥	1988년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	낙성대(배)가압장	180,000㎥/일	1990년	철근콘크리트 구조물	내진성능 평가대상
정밀점검	선우배수지	6,000㎥	2005년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	금천배수지	60,000㎥	2000년	철근콘크리트 구조물 : 3지
	금천(배)가압장	10,200㎥/일	2000년	철근콘크리트 구조물
	봉천11(대)배수지	3,000㎥	2006년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	봉천11(배)가압장	8,000㎥/일	2006년	철근콘크리트 구조물

4. 용역목적

본 용역은 남부수도사업소 관내 독산배수지외 8개소 배수지, 가압장 시설물에 대한 현장조사 및 각종 시험에 의해 시설물의 물리적, 기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하고, 이에 대한 신속하고 적절한 조치 및 보수․보강방법을 제시하여 시설물의 안전을 확보함에 있음

5. 용역기간 : 착수일로부터 2019.12.20.까지

6. 예정공정표

추진일정 과업내용	3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월			비고
1. 현황조사 및 과업 수행계획서 작성
2. 외관조사 및 시험
3. 조사 자료검토 및 분석
4. 종합적인 상태평가
5. 보고서 작성
공 정(%)	5			10			10			15			15			10			10			10			10			5
누계공정(%)	5			15			25			40			55			65			75			85			95			100