설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 황윤기		요청일		2019년 07월 일
공 사 명	동부간선도로 확장공사(3공구)
공사개요	공사규모		L = 2.25㎞, B = 4~6차로
	공사기간		2008. 02. 15 ~ 2020. 12. 31
	감 리 사		동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
	설 계 사		(주)동일기술공사, (주)건화
	시 공 사		세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문 안건명			중랑천 자전거도로 및 산책로복구 정산보고				요청금액		감 78,837천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 동부간선도로 확장공사(3공구) 시행으로 파손된 중랑천 자전거도로 및 산책로(상일보도육교 ~ 상도교, L=1,240m) 복구공사 완료 후 물량정산 및 노원구청 요청사항 검토 반영 (노원구청 요청사항) 1)미끄럼방지포장 주행성 확보(T=3mm → 2mm), 2)디자인난간 반영(구청관리구간 동일제품), 3)노면표시 추가 반영(속도제한 20, 자전거 산책로 문자)
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 미끄럼방지포장(주행성 확보) T 3mm→2mm, A 7,165→7,123㎡ 감 42㎡ - 디자인난간 반영(37경간 → 37경간) 체인형→디자인형(구청기설치동일제품) - 노면표시 852㎡ → 928㎡, 증 76㎡ ▪ 물량 증감내역 - 별첨					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 686,851 천원 - 변 경 : 604,014 천원 - 증 감 : 감 78,837 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련공문 1부.					▪ 공사예정시기 :

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	동부간선도로 확장공사(3공구)
계약금액	106,863,713 천원	계약일	2008.02.12	시공사	세원건설(주), 홍용종합건설(주)
공사기간	2008.02.15 ~ 2020.12.31	낙찰율	73.29%	설계자	(주)동일기술공사 (주)건화
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	동부엔지니어링(주) (주)한국건설관리공사
공사규모	-도로확장(폭: 4~6차로, 연장: L=2.25km) ․ 지하차도 2개소/590.0m ․ 수락고가차도 1개소/300.0m ․ 상일보도육교 1개소/34.0m ․ 옹벽공 2,898.0m			※ 작성자 : 황윤기 업무담당(☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 미끄럼방지포장(3mm) 7,165m2 - 체인난간 37경간 - 노면표시 852m2		- 미끄럼방지포장(2mm) 7,123m2 - 디자인형울타리 36경간 - 노면표시 928m2	감 42m2 감1경간 증 76m2
공 사 비	686,851천원		608,014천원	감 78,837천원
적 용 요 율	-		86.645%	협의율
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	국가계약법 시행령 제65조 ➂항 3호(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우)
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부-19-7605호, 2019. 07. 02)
	관련규 정	공사계약일반조건 제19조①항 4호, 제19조의 5
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	중랑천 자전거도로 및 산책로 복구 완료에 따른 정산 및 노원구청 요청 내용 반영 1) 미끄럼 방지포장 주행성 확보 2) 디자인 난간 반영 3) 노면표시 추가
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(중랑천 자전거도로 및 산책로 정산) SWCON(동부)- 19-169, ‘19.06.18

· 실정보고 검토보고 동삼감 제2019-82, ‘19.06.26

· 실정보고 승인 도시기반시설본부-19-7605, ‘19.07.02