3,4단계 통수를 위한 시공계획서

□ 공사명 : 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

◦ 위    치 : 강서구 내발산동 644번지(발산역사거리)외 2개소

◦ 공사 개요 : 1차) 라인스토핑(D700)후 기존관(D700) 연결

2차) 발산역사거리 D800x700x500분기 및 기존관연결

3차) 발산역사거리 D700/400분기 및 기존관연결

4차) 강서구청 사거리 기존관(D600)연결

배관도

1) 1차 연결공사

- 일     시 : 2014. 10. 24(금) 22:00 ~ 익일07:00

- 위     치 : 강서구청 사거리

- 공사 내용 : 발산역방향 라인스토핑으로 기존관 차단후 신설관 D700에서 기존관(D700)연결

- 작업 시간 : 22:00 ~ 익일07:00 (9시간)

- 단수 여부 : 단수해당없음

위치도	공사상세도

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고
안전시설설치 및 터파기	1시간
라인스토핑 차단	3시간
퇴 수	1시간
기존관 절단 및 배관	2시간
세척 및 통수	0.5시간
되메우기(다짐)	0.5시간
현장정리 및 청소	1시간
합 계	9시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	발전기	10KW	〃	2	〃
3	양수기	10HP	〃	2	〃
4	람마기	80KG	〃	1	〃
5	백호	0.4	〃	2	〃
6	관절단기		〃	2	〃

라인스토핑 공정도

2) 2차 연결공사

- 일     시 : 2014. 10. 25(토) 22:00 ~ 익일08:00

- 위     치 : 발산역사거리(내발산동 655-6번지)

- 공사 내용 : 발산역사거리(내발산동 655-6번지)  D800x700x500분기 및 기존관연결

- 작업 시간 : 22:00 ~ 익일08:00 (10시간)

- 단수 여부 : 단수해당없음

위치도	공사상세도

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고
안전시설설치 및 터파기	2시간
제수밸브 개폐	-
퇴 수	1시간	양수기
기존관 절단 및 배관	4시간
세척 및 통수	1시간
되메우기(다짐)	1시간
현장정리 및 청소	1시간
합 계	10시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	발전기	10KW	〃	2	〃
3	양수기	10HP	〃	2	〃
4	람마기	80KG	〃	1	〃
5	백호	0.4	〃	2	〃
6	관절단기		〃	2	〃

3) 3차 연결공사

- 일     시 : 2014. 10. 27(월) 22:00 ~ 익일08:00

- 위     치 : 발산역사거리(내발산동 655-6번지)

- 공사 내용 : 발산역사거리(내발산동 655-6번지)  D700/400분기 및 기존관연결

- 작업 시간 : 22:00 ~ 익일06:00 (8시간)

- 단수 여부 : 단수해당없음

위치도	공사상세도

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고
안전시설설치 및 터파기	2시간
제수밸브 개폐	-
퇴 수	1시간	양수기
기존관 절단 및 배관	2시간
세척 및 통수	1시간
되메우기(다짐)	1시간
현장정리 및 청소	1시간
합 계	8시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	발전기	10KW	〃	2	〃
3	양수기	10HP	〃	2	〃
4	람마기	80KG	〃	1	〃
5	백호	0.4	〃	2	〃
6	관절단기		〃	2	〃

4) 4차 연결공사

- 일     시 : 2014. 10. 27(화) 22:00 ~ 익일06:00

- 위     치 : 강서구청사거리

- 공사 내용 : 강서구청 사거리 기존관(D700)연결

- 작업 시간 : 22:00 ~ 익일06:00 (8시간)

- 단수 여부 : 단수해당없음

위치도	공사상세도

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고
안전시설설치 및 터파기	2시간
제수밸브 개폐	-
퇴 수	1시간	양수기
기존관 절단 및 배관	2시간
세척 및 통수	1시간
되메우기(다짐)	1시간
현장정리 및 청소	1시간
합 계	8시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	발전기	10KW	〃	2	〃
3	양수기	10HP	〃	2	〃
4	람마기	80KG	〃	1	〃
5	백호	0.4	〃	2	〃
6	관절단기		〃	2	〃

※ 공통사항

□ 인력확보 계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부 (용접공)
계	7명
소장	박진삭	서울시 구로구 개봉동 322-15	**************
배관공	유종찬	서울시 강서구 공항동 665-5	**************
배관공	전용운	서울시 강서구 공항동 680-5	**************
배관공	정하모	서울시 동작구 사당동 446-40	**************
배관공	박태식	서울시 동작구 사당동279-26	**************
용접공	원웅재	서울시 구로구 개봉1동 67-24	**************	77203416511A
용접공	김현오	인천시 부평구 십정동 607	**************	98402052242U

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

◦ 관계기관 공문발송 및 승인 현황

- 굴착허가 : 강서구청

- 교통협의 : 강서경찰서

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독자 : 시설관리공단 서 홍 석 담당자 : 강서수도사업소 김 근 용	************* 02-3146-4014
업 체	회 사 명 : 안일건설 대표 유미정 현장소장 : 박 진 삭	*************

□ 시험굴착 완료

◦ 공사구간내 기존관 확인 : 10.11(야) 확인

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

◦ 공사안내간판

◦ 휀스, 유도등

◦ 교통안내원 배치 등

※ 교통협의 내용에 따라 시행

□ 기타사항 : 홍보계획

◦ 공사 안내문 부착 및 배부 : 단수 해당없음

◦ 단수세대 : -