작업 계획서(D700분기 연결공사)

□ 공사명 : 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

◦ 위    치 : 강서구 화곡동1106-1호외 4개소

◦ 공사 개요 : 1차) 연결공사 1개소 (D700/500)

2차) 연결공사 4개소 (D700/300, D700/300, D700/80, D700/80)

1) 1차 연결공사

- 일     시 : 2014. 08.23(토) 22:00 ~ 익일06:00

- 위     치 : 강서구청사거리 (화곡동1106-1호)

- 공사 내용 : 신설관 D700/500분기부에서 기존관(D500) 연결공사

- 작업 시간 : 22:00 ~ 익일06:00 (8시간)

- 단수 여부 : 순환관망 활용으로 단수없이 작업.

위치도	공사상세도

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
안전시설설치 및 터파기	2시간
제수밸브 개폐	1시간
퇴 수	1시간	양수기
기존관 절단 및 배관	1시간
세척 및 통수	1시간	공사 시행전 사전 접합
되메우기(다짐)	1시간
현장정리 및 청소	1시간
합 계	8시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	발전기	10KW	〃	1	〃
3	양수기	10HP	〃	2	〃
4	람마기	80KG	〃	1	〃
5	백호	0.4	〃	1	〃
6	관절단기		〃	2	〃

2) 2차 연결공사

- 일     시 : 2014. 09.04(목) 22:00 ~ 익일06:00

- 위     치 : 강서구청사거리 (화곡동1094번지)

- 공사 내용 :

① 700/300연결공사 -화곡동1094-1호

② 700/300연결공사 -화곡동1145번지 롯데캐슬APT

[아파트관리소 김인수과장 : 2602-7413]

[상가 총무 : *************]

③ 700/80연결공사 -화곡동 1093-76번지 88체육관

[2600-8724]

④ 700/80연결공사 -내발산동 119-5번지 한국가스공사

[한국가스공사 업무지원팀 이미옥 : 2657-1012]

- 작업 시간 : 22:00 ~ 익일06:00 (8시간)

- 단수 여부 : ①번: 연결부와 중간밸브사이에 인입관이 없어 단수없는 실정임.

②,③,④번: 단수 5시간이며 롯데캐슬상가를 제외한 건물은 저수조를 갖추고 있어 실질적인 단수는 없음

☞ 롯데캐슬상가는 물사용이 없는 시간대, 즉 야간 공사를 시행하여 민원 최소화

위치도

공사 상세도 (4개소 배관동일)

□ 작업 소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
안전시설설치 및 터파기	2시간
제수밸브 개폐	-
퇴 수	-
기존관 절단 및 배관	1시간
세척 및 통수	30분
되메우기(다짐)	30분
현장정리 및 청소	1시간
합 계	5시간

□ 장비확보 계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	도로카타기		대	1	확보 완료
2	발전기	10KW	〃	1	〃
3	양수기	10HP	〃	2	〃
4	람마기	80KG	〃	1	〃
5	백호	0.4	〃	1	〃
6	관절단기		〃	2	〃

※ 공통사항

□ 인력확보 계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부 (용접공)
계	7명
소장	박진삭	서울시 구로구 개봉동 322-15	**************
배관공	유종찬	서울시 강서구 공항동 665-5	**************
배관공	전용운	서울시 강서구 공항동 680-5	**************
배관공	정하모	서울시 동작구 사당동 446-40	**************
배관공	박태식	서울시 동작구 사당동279-26	**************
배관공	조성태	서울시 관악구 신림10동 320-17	**************
배관공	신길용	부천시 소사구 괴안동 160-5	**************

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

◦ 관계기관 공문발송 및 승인 현황

- 굴착허가 : 강서구청

- 교통협의 : 강서경찰서

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독자 : 시설관리공단 서 홍 석 담당자 : 강서수도사업소 김 근 용	************* 02-3146-4014
업 체	회 사 명 : 안일건설 대표 유미정 현장소장 : 박 진 삭	*************

□ 시험굴착 완료

◦ 공사구간내 기존관 확인 : 8.15(야) 확인

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

◦ 공사안내간판

◦ 휀스, 유도등

◦ 교통안내원 배치 등

※ 교통협의 내용에 따라 시행

□ 기타사항 : 홍보계획

◦ 공사 안내문 부착 및 배부 : 8/25(월)예정

◦ 단수세대 : 700/500(화곡동1094번지앞 : 단수없음)

700/300(화곡동1094-1번지앞 : 단수없음)

700/300(화곡동1145번지)

- D250 롯데캐슬아파트 저수조 有 : 단수없음

- D40  롯데캐슬상가   저수조 無 : 단수있음

(물사용이 없는 시간대, 즉 야간 공사를 시행하여 민원 최소화)

700/80(화곡동 1093-76 KBS스포츠월드 저수조 有 : 단수없음)

700/80(내발산동 119-5 한국가스공사 저수조 有 : 단수없음)