진행중인 건설공사장

(2015년 수방대책)

1. 하천변 공사(12개소)

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정율
1	마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동	월드컵대교 건설공사	교량신설B=6차로, L=1.98km	‘10. 3.22	‘20.12.30	23
2	강동구 암사동 ~ 구리시 아천동	구리암사대교 건설공사	교량신설B=4~6차로, L=1.1km	‘06. 4 .5	‘15.12.30	98
3	중랑구 면목동 194-9	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	교량건설 B=20m L=395m,도로확장 B=20m, L=395m	‘08.10.23	‘15.12.31	90
4	성동 금호동4가 용비교 서측~성수동 용비교 동측	용비교~행당중간 도로개설공사	도로개설 폭5~6차로, L=718m	‘07. 3.22	‘15.12.31	84
5	성동 응봉동 대림아파트~성수1가 삼표레미콘	응봉교 확장 및 성능개선공사	교량확장B=4→6차로, L=633m	‘08.10.20	‘15.12.31	85
6	동대문구 장안동92 ~ 중랑구 면목동170	장안교(구교)성능개선공사	교량신설 B=17m, L=218m, 기존교량철거	‘14.12.16	‘16.12.15	5
7	초안산근린공원 ~ 상계8동 주공11단지	동부간선도로 확장공사 (2공구)	교량신설 B=2~6차로→7~8차로, L=3.2km	‘08.12.30	‘15.12.31	56.6
8	노원구 상계8동 주공15단지 ~의정부시계	동부간선도로 확장공사 (3공구)	도로확장 B=4~6차로, L=2.25km	‘08.2.15	‘15.12.31	55
9	구로구 고척동 63-3일원	서남권돔구장 보행자 전용도로 (보행광장) 설치 및 고척교 확장	보행광장 B=28.3m L=150m, 고척교 확장	‘13. 4 .8	‘15. 6.30	83.6
10	금천구 시흥동 ~ 광명시 소하동	강남순환 도시고속도로 건설공사(4공구)	도로개설 폭4~8차로, L=2.48km	‘01. 3.22	‘16.5.19	56
11	서초구 양재대로 187	강남순환 도시고속도로 건설공사(8공구)	도로개설 폭 4~10차로, L=7.96km	‘02. 07	‘18. 07.	25.2
12	강북구 우이동유원지입구 ~국립4.19묘지입구 사거리	경전철 우이 ~ 신설 1공구 건설공사	경전철 설치 L=1.9km	‘09. 9.15	‘16.11.30	72

2. 굴착공사(38개소)

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정율
1	송파구 신천동 29일대	잠실역 버스환승센터 조성	정류장 8면, 버스주차장23면	‘14.5.28	‘16. 9.27	17.8
2	강동구 암사동~고덕로 훈련원사거리	구리암사대교 연결도로 건설	도로개설L=1.88km, (B=31.5m)	‘12.8.2	‘15.12.31	78.3
3	구로구 개봉동 198-`1 일대	남부순환로(개봉역주변) 구조개선	지하차도설치 4차로 L=736m	‘07.9.10	‘15.10.31	96.5
4	강동구 암사동440-1~고덕동 165-11	선사로∼고덕지구간 도로확장	도로확장B=8→25m L=3.72m	‘09.01	‘15.12.31	65
5	종로구 권농동8~원남동 166	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선	도로확장B=4→6차로 L=800m	‘10.10.11	‘17.12.31	47
6	강서구 방화로~부천시 오정대로 삼거리	남부순환로∼오정대로간 도로개설	도로개설B=40m L=1.23km	‘10.9.29	‘15.12.30	59
7	강서구 방화동 ~올림픽대로	방화대교 남단 접속도로	도로개설 3km L=1.23km	‘05.10.5	‘15.10.31	91
8	용산구 보광동217-31	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선	고가철거 L=510m, 교량신설 L=405m,	‘11.1.6	‘15.12.31	72
9	관악구 신림동~봉천동 일원	신림∼봉천터널(2공구) 도로건설	터널건설 폭 4차로 L=2.48km	‘10.10.8	‘17.12.31	21.3
10	은평구 신사동~고양시 덕양구 향동동	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	도로개설 B=25m, L=867m	`12.12.27	`15.12.26	72
11	광진구 구의동 아차산역~광장동 광나루역	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 B=10차로, L=900m	‘10.10.11	‘15.12.31	58

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정율
12	금천구 시흥동 ~ 관악구 신림동	강남순환 도시고속도로 건설공사(5공구)	도로건설 B=6차로 L=5.1km	‘09.9.1	‘16. 5.19	77.2
13	관악구 신림동 ~ 낙성대동	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-1공구)	도로건설 B=3~4차로 L=1.13km	‘09.9.1	‘16. 5.19	65
14	관악구 봉천동 ~ 남현동	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-2공구)	터널설치 L=2.2m, 지하차도 1개소	‘09.4.1	‘16. 5.19	77
15	서초구 방배동 2726	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-1공구)	도로개설 폭6차로, L=1.04m	‘10.6.1	‘16. 5.19	65.5
16	서초구 방`배동 ~ 우면동	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-2공구)	서초터널 6차로, L=2.1km	‘08.4.1	‘16. 5.19	75.2
17	성북 정릉동 국민대앞	도시고속도로 연결램프 (정릉길)설치공사	램프설치 B=6.26m, L=533m	‘13.12.30	‘16.12.29	6.3
18	서초구 내곡동	어린이병원 발달센터 증축공사	지하2/지상5	`15.1.20	`17. 2.19	12.3
19	성동구 용답동	재사용플라자 건립공사	지하2/지상5	`15.1.15	`17. 1.14	8.1
20	강서구 양천로 201 서남물재생센터 내	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리시설4,000톤/일	‘12.11.15	‘16. 6.30	52
21	노원구 공릉동406-3	공릉2빗물펌프장 신설공사	펌프장 증설 520㎥/min	‘13.1.8	‘15.12.31	40
22	동대문 이문동 58-3	신이문 빗물펌프장 증설공사	펌프장 증설 875㎥/min,	‘13.1.3	‘15.12.31	97
23	강남구 일원돌 580	탄천물재생센터 복개공원 4단계공사	복개 A=33.978㎡, 공원화 A=36,920㎡	‘13.10.1	‘16. 9.29	54.6
24	관악구 신림동 205	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	저류조설치 65,000㎥	‘12.1.6	‘17. 5.30	74.8
25	양천구 신월동 ~ 목동빗물펌프장	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	저류배수터널 L=3,628m, 유도수로터널 L=1,097m	‘13.5.27	‘17.12.31	13.8
26	마포구 합정동 196-4, 성산동 99-5	합정외1개소 빗물펌프장 증설공사	합정 : 펌프장증설 160㎥/min, 중동: 펌프장증설 2100㎥/min,	‘13.1.4	‘16. 4.30	55
27	강서구 방화동 65-2	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	시설현대화 36만㎥/일	‘09.11.19	‘16. 2.28	37.7
28	성동구 자동차시장 3길 64	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	시설현대화 25만㎥/일	‘09.2.13	‘16. 2.28	70.5
29	강서구 마곡동 91 서남물재생센터 내	마곡지구내 재생수공급 시설 설치공사	재생수처리시설 2만톤/일	‘11.11.1	‘16. 07.	99
30	강북구 수유동	우이~신설 도시철도 민간투자사업(2공구)	L=3.23km(정거장4개소)	‘09.9.15	‘16.11.30	75.9
31	강북구 미아동 ~ 성북구 정릉동	우이~신설 도시철도 민간투자사업(3공구)	L=3.17km(정거장3개소)	‘09.9.15	‘16.11.30	69.5
32	성북구 정릉동 ~ 동대문구 신설동	우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구)	L=3.09km(정거장3개소)	‘09.9.15	‘16.11.30	73.6
33	송파구	지하철918공구 건설공사	L=1,125m(정거장1개소)	‘10.02.19	‘16.02.17	60.9
34	“	지하철919공구 건설공사	L=1,560m(정거장2개소)	‘09.12.31	‘15.12.29	43
35	“	지하철920공구 건설공사	L=1,390m정거장1개소	‘09.12.31	‘15.12.30	55.3
36	“	지하철921공구 건설공사	L=1,742m(정거장2개소)	‘09.12.31	‘15.12.29	50.1
37	강동구	지하철922공구 건설공사	L=1,470m(정거장1개소)	‘10.09.16	‘16.03.17	61
38	“	지하철923공구 건설공사	L=1,728m(정거장1개소)	‘10.09.20	‘16.03.21	50.5

3. 기타공사(5개소)

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정
1	용산구 용산체육문화센터~마포구 가좌역	경의선 숲길 공원조성공사	공원조성L=3.48km, A=84,268㎡	‘13.9.3	‘16. 3.31	62.3
2	마포구 상암동	IT-컴플렉스 건립공사	지하7/지상17	`09.4.3	`16. 2.29	85.3
3	노원구 하계동	서울과학관 건립공사	지하1/지상3	`14.1.13	`16. 1.12	32
4	구로구 고척동	서남권야구장 건립공사	지하2/지상4	`09.2.4	`15. 9.15	94.5
5	종로구 와룡동	돈화문국악예술당 건립공사	지하3/지상1	`13.12.17	`15.10.16	55.9