□ 자동차전용도로 비굴착공사 점검일정(6개소)

연번	점검일정	노선	공사명	공사내용 (비굴착공법)	현재공정 (공정율)	발주청
1	‘18.11.7(수) 14:00	고속국도1호 (양방향)	양재천 우안도로 개설공사	교량2개소, 지하차도1개소 신설 2연암거(18.7*7.5), L=48m (UPRS공법)	공사중지중 (상부열 6seg중 2seg 완료) (20%)	서울주택도시공사 (기반시설사업부)
2	‘18.11.7(수) 15:00	올림픽대로 (양방향)	한강공원 나들목 개선공사 (풍납토성,나루터길나들목)	차수벽 철거 및 육갑문 설치 D=480mm, L=30m 상부 16공, 측벽 22공 (STM공법)	상부 8본 추진완료 (56%)	한강사업본부 (기반시설과)
3	‘18.11.9(금) 14:00	강변북로 (난지)	신마포나들목 증설공사	보행전용나들목 신설 D=900mm), L=30m (UPRS공법)	하부열 추진 준비중,1차로 포장복구예정 (50%)	한강사업본부 (기반시설과)
4	‘18.11.9(금) 15:00	강변북로 (난지)	당인빗물펌프장 증설공사	빗물펌프장 증설공사 강관압입:D=2,500mm, L=40m (DSM공법)	공동 긴급복구 中 (64%)	마포구 (치수과)
5	‘18.11.9(금) 16:00	강변북로 (난지)	한강공원 나들목증설공사(망원)	보행전용나들목 신설 D=900mm), L=66m (STS공법)	측벽열 추진 준비중 (30%)	한강사업본부 (치수과)
6	‘18.11.9(금) 17:00	올림픽대로 (양방향)	마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설 조성공사 (2단계)	한강나들목 L=41m 한강연결보행로 L=151m 유수지 복개 25,635㎡ (TRCM공법)	제내지 추진기지 설치중 (10%)	서울주택도시공사 (마곡사업부)