주요 심사내용

□ 공 사 명: 강서로 및 양천로 도로정비공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	강서구 마곡동 일원
공사개요	◦ 보·차도 및 자전거도로 폭원조정에 따른 도로정비 - 강서로 L=1,091.4m (B=28.1~30.0m) - 양천로 L=1,132.4m (B=30.0~30.4m) - 공항대로 L=660.0m (B=45.0~51.0m)
공사기간	2019. 4. 4. ~ 2022. 6. 30.

□ 심사평가 결과

◦	설계변경금액(증)	:	621,743	천원
◦	심 사 금 액(증)	:	598,118	천원
◦	조 정 액	:	23,625	천원
◦	조 정 률	:	3.80	%

◦ 심사결과(계약심사요령 제6절)

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
	⦿

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 등 조정

- 경유 1,334.6원/L, 휘발유 1,480.0원/L 적용 (감 1,145천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 폐토운반: 대기시간 10분 초과로 재료비 공제(품셈공통8-1-3)(감 2,014천원)

- 도로노면 살수비: 일요일 21일 제외 (감 14,930천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견 없음.