주요 심사내용

□ 공 사 명 : 관천로 초록풍경길 조성공사

□ 사업개요

위 치	관악구 관천로(남부순환로 봉림교 ~ 신사동 우방아파트)
공사개요	◦ 아스팔트 덧씌우기: 172.53a ◦ 보도블럭 포장: 50.29a ◦ 기타 부대공 등
공사기간	착공일로 부터 6개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,203,400	천원
○	심사금액	:	1,184,917	천원
○	절 감 액	:	18,483	천원
○	절 감 률	:	1.5	%

□ 주요 심사내용

○ 유류, 자재단가 등

- 경  유: 1,191.47원/ℓ → 1,082.1원/ℓ(2020년 6월 서울지역 주유소 판매단가)

- 휘발유: 1,345.21원/ℓ → 1,249.3원/ℓ(2020년 6월 서울지역 주유소 판매단가)

- 혼합골재: 20,000원/㎥ → 18,000원/㎥

- 보통시멘트: 3,682원/kg → 3,473원/kg

- 외송각재: 464,671원/㎥ → 376,675원/㎥

- 교통안전표지판(삼각형,1변 90㎝,AL판): 90,000원/개 → 54,090원/개 등  14종 거래실례가 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 우수 연결관 접합 및 부설: 공구손료 및 잡재료비 인력품의 3%

- 도로경계석설치(150×150×1000mm,직선): 노무품 조정(품셈토목1-10-3)

- 공구손료, 잡재료비: 경비 → 재료비로 계상

- 보행 안전도우미: 노무비 → 경비로 계상

- 보도블록 포장 철거(폐기용): 인력 → 기계(BH0.2㎥) 적용(서울형 품셈)

- 보도포장 안전시설비: 경비로 적용

- 상차, 잔토처리, 강재운반, 소운반 등: 개별비목 → 경비로 계상, 운반속도 및 노무품 조정

○ 제경비율

- 하도급대금지급보증수수료: 제외(전문공사)

- 건설기계대여대금지급보증액: 0.4% → 0.68%(전문건설업)

- 일반관리비: 6.0% → 5.5% (전문공사 5억~30억미만)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상: 심의완료

○ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)