주요 심사내용

□ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사-설계변경

□ 사업개요

위 치	양천구 신월동 신월IC ~ 경인 제2지하차도 BOX시점
공사개요	도로연장 1.22km(왕복4차로, 지하차도 995m)
공사기간	2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,341,900	천원(증액)
◦	심사금액	:	2,068,000	천원(증액)
◦	조 정 액	:	273,900	천원
◦	조 정 률	:	11.70	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정(’21.10월기준)

- 휘발유 : 1,207원/L → 1,571.5원/L (증112천원)

- 경유 : 1,015원/L → 1,386.8원/L (증10,006천원)

- 소철선(4.0mm) : 1,560원/kg → 1,020 원/kg

- 아스팔트유제 : 160,000원/드럼 → 126,000원/드럼

- 고철 : 480원/kg → 520원/kg

◦ 일위대가 조정

- 강관부설(900mm이하) : 크레인규격(15→10ton) 조정(토목6-3-1)

- 조립식간이흙막이 : 노무품 조정 (감26,350천원)

- 말뚝박기용천공 : 발전기 용량 조정(서울형품셈) (감3,897천원)

- 스티프너설치 : 용접품 제외(H빔설치 품에 포함) (감6,402천원)

- 복공판설치 : 복공판 손율 적용(공통2-2-1) (감27,866천원)

- 외측주형보받침설치,철거 : 볼트 연결품 제외(H빔설치철거품에 포함)

- PE방호벽설치및철거 : PE방호벽 손율 적용(공통2-2-2) (감120,300천원)

- 강판구멍뚫기 : 서울형품셈 적용 (감10,046천원)

- 볼트조이기,풀기 : 서울형품셈 적용 (감3,568천원)

- 전기용접 : 특별인부 작업효율 적용 제외(기계13-2-4) (감2,751천원)

- 교통신호수,모범운전수 : 전체 경비항목 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비,관급자재 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)