주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명: 남부순환로(개봉1사거리주변) 평탄화공사-설계변경

□ 사업개요

위 치	남부순환로 매봉초~오류IC
공사개요	도로구조개선(6차로→8차로) L=1.1km
공사기간	2016. 3. ~ 2025. 6.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	4,116,456	천 원(증액)
◦심사금액:	3,825,260	천 원(증액)
◦조 정 액:	291,196	천 원
◦조 정 률:	7.07	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- ㄱ형강: 1,060원/kg → 1,040원/kg

- H형강: 1,245천원/톤 → 1,230천원/톤

- 열연후판(9＜T≤ 12): 1,185원/kg → 1,132원/kg

- 열연후판(20＜T≤ 30): 1,182,000원/M/T → 1,138,800원/M/T

- 복공판: 863,000원/개 → 830,000원/개

- 고철: -440원/kg → -480원/kg

◦ 일위대가 조정

- 간이흙막이(TS판넬): 노무품 수정(공통2-10-5) (감34,474천 원)

- 말뚝박기천공: 천공시간 산출오류 수정(공통5-3-2) (감32,613천 원)

- 케이싱튜브설치및철거: 중복 제외(말뚝박기천공에 포함) (감10,058천 원)

- 스티프너설치: 용접품 제외(H빔설치철거에 포함),강판고재반영 (감29,008천 원)

- SGR천공: 서울형품셈 적용(감30,692천 원)

- 침하방지철판 등 : 강판고재반영 (감12,198천 원)

- PE방호벽: 자재 손율 적용 및 설치품 수정(공통2-2-3,2-9-4) (감37,585천 원)

- 가림막휀스: 자재 손율 적용(서울형품셈), 설치품 수정(공통2-9-9) (감16,050천 원)

- 교통신호수(야간): 야간능률저하 할증 제외(작업능률과 무관)

- L형측구헐기및복구(야간): 야간할증 중복계상 제외

- 교통안전시설: 경비 항목 적용

- 기존관폐쇄: 경량기포콘크리트타설 단위수량 오류 수정 (증24,177천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)