주요 심사내용(총괄)

□ 사 업 명 : 남현소공원 지하주차장 건설공사

□ 사업개요

○ 공사위치 : 관악구 남현동 1063-1

○ 공사내용 : 지하 1~3층 주차장 96면, 지상 : 공원

○ 공사기간 : 2020. 03 ~2021. 08

○ 총공사비 : 10,657백만원(도급비 9,811백만원)

□ 심사평가 결과 : 절감액 148백만원 (1.5%)

[단위 :천원]

구 분	요청금액 (도급비)	심사금액 (도급비)	절 감 액	절감률
계	9,811,110	9,662,968	148,142	1.5%
토 목	7,964,729	7,847,720	117,009	1.5%
건 축	1,332,210	1,320,857	11,353	0.9%
조 경	514,171	494,391	19,780	3.8%

주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 남현소공원 지하주차장 건설

□ 사업개요

위 치	관악구 남현동 1063-1
공사개요	- 지하1~3층 주차장 96면 - 지상 공원조성
공사기간	2020. 03. ~ 2021. 08 (18개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	7,964,729	천원
◦	심사금액	:	7,847,720	천원
◦	절 감 액	:	117,009	천원
◦	절 감 률	:	1.5	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,491원/L → 1,488.4원/L(한국석유공사 2월 발표자료)

- 경  유 : 1,345원/L → 1,340.2원/L(한국석유공사 2월 발표자료)

- 모래 : 30천원/㎥ → 29천원/㎥

- 도로용폐인트(융착식,백색) : 3,140원/kg → 2,750원/kg

- 도로용폐인트(융착식,황색) : 4,100원/kg → 3,150원/kg

- 내수합판(12 x1220x2440㎜,1급) : 8,419원/㎡ → 8,012원/㎡

- PVC파이프(일반용VG2,100㎜×4ｍ) : 4,555원/m → 4,250원/m

- PE드럼(Ø500×800) : 21,000천원/개 → 14,460원/개

- EPS토목블럭 : 120천원/개(D-30) → 840천원/개(D-20)

등 거래실례가 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 철근콘크리트깨기 : 아세틸렌 → LPG 적용(품셈기계13-2-2)

- 되메우기 및 다짐 : 인력 → 플레이트 콤펙트(1.5ton) 적용

- 굴착 및 상차 :  K = 0.7→ 0.9 E = 0.45(불량) → 0.6(보통)

- 사토운반 : 운반속도 조정(올림픽대로 55.6km/hr)

- 말뚝박기 및 천공,C.I.P공 천공(풍화암, 연암, 보통암)

: Button Bit 손료 제외(Air Hammer 손료와 중복) 등

- 버팀보연결 : 강판구멍뚫기 제외(버팀보 설치 품에 포함, 품셈3-1-2)

- 부력방지 앵커

ㆍ그라우팅 : 주입량 조정(앵커 단면적 제외, 서울형 품셈)

ㆍ강연선인장기 : 120ton → 60ton 적용(품셈공통5-1-5,5)

- 철근 공장가공 조립 : 가공 비가공 구분적용

◦ 원가계산 제비율 조정

- 환경보전비 : 0.5% → 0.8%(기타 공사)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 심의완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

주요 심사내용(건축)

□ 공 사 명 :  남현소공원 지하주차장 건설

□ 사업개요

위 치	관악구 남현동 1063-1
공사개요	- 지하1~3층 주차장 96면, 지상 공원조성
공사기간	2020. 03. ~ 2021. 08. (18개월)

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,332,210	천원
◦ 심사금액 :	1,320,857	천원
◦ 절 감 액 :	11,353	천원
◦ 절 감 률 :	0.85	%

□ 주요 심사 내용 (※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 철강설 외 5종(△121천원)

○ 일위대가 조정

- 화강석 습식바닥 붙임 : 서울형품셈 적용(△1,062천원)

- 바탕고르기(벽/바닥) : 표준품셈 적용(△248천원)

- 압착붙이기(벽/바닥) : 표준품셈 적용(△351천원)

- 압출발포폴리스티렌단열재 : 서울형품셈 적용(△77천원)

- 강재창호 : 표준품셈 적용(△241천원)

- 다기능다채무늬(내부/내부천정) : 표준품셈 적용(△1,482천원)

- 콘크리트면 정리(벽) : 표준적용 오류 정정(△1,137천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음

주요 심사내용(조경)

□ 공 사 명 :  남현소공원 지하주차장 건설

□ 사업개요

위 치	관악구 남현동 1063-1
공사개요	- 지하1~3층 주차장 96면, 지상 공원조성
공사기간	2020. 03. ~ 2021. 08. (18개월)

□ 심사평가 결과

○ 설계금액	514,171	천원
○ 심사금액	494,391	천원
○ 절 감 액	19,780	천원
○ 절 감 율	3.8	%

□ 주요 심사 내용 (※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(부처꽃 등 46개품목)

○ 일위대가 조정 및 제비율

- 화강석통석 : 정원석 쌓기→ 조경유용석 놓기 적용(△2,214천원)

- 벽천설치 : 벽천설치 조사단가 적용(△11,717천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음