계약심사 조정내역

□ 공 사 명 : 박미빗물펌프장 증설공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥대로 47-9
공사개요	- 유수지 용량 증설 : 3,257㎥ → 6,277㎥ - 배수펌프 용량 확충 : 940㎥/min → 970㎥/min
공사기간	2019. 5. 2. ~ 2020. 8. 1.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	931,000	천원
○	심사금액	:	870,482	천원
○	절 감 액	:	60,518	천원
○	절 감 률	:	6.5	%

○ 심사결과 통보

원안통과	수정	재검토
	○ (심사요청 내용을 수정하여 설계변경)

□ 주요 심사내용

○ 내역서 및 일위대가 등

- 천공 전용오거 전도방지 와이어로프 설치 : 해체비 조정(설치품의 70%→50%)

- 공구손료 : 경비 → 재료비

- 가공레일 상차 및 운송 : 할증 중복 제외

- 중기운반 : 운반횟수 조정

- 자갈살포 : 품셈4-1-3 기준으로 조정

- H형강철거(버팀보, 5M이하) : 타이어크레인 25톤 → 10톤, 인력품 조정

- 열차감시원, 철도운행선안전관리자 : 경비로 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 영향성평가 용역비, 관급자재비, 이전비는 심사 제외