주요 심사내용

□ 공 사 명 : 밤고개로 도로확장공사 설계변경(토목)

□ 사업개요

위 치	강남구 세곡동사거리 ～ 수서IC
공사개요	도로확장 6차로 → 7~8차로, 연장 1.845㎞
공사기간	착공일로부터 1,095일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,869,443	천원
◦	심사금액	:	2,666,950	천원
◦	절 감 액	:	202,493	천원
◦	절 감 률	:	7.1	%

◦ 심사결과(계약심사요령 제6절)

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
	⦿

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 일위대가 조정

- 사토운반(토사) : 매립지 L=69.35km→60.68km, 운반노선 조정

- 조립식간이흙막이 : BH0.6㎥ → BH0.4㎥적용(4m이하), 작업반장 제외

- 우수관부설, 연결관, 관천공, 하수관 CCTV 조사비, 하수관수밀시험,

상수도 관부설공 등

: 지세할증(번화가) 제외

※ 질의회신 : 계약심사과-9025호(2017.4.28.),“16장 관부설 및 접합”은 도로, 도심지, 주택가 등 다양한 여건의 현장을 대상으로 조사된 기준임.

- 시멘트 운반비, 철근 운반비, 아스팔트유제 운반 : 개별비목 → 경비적용

- 가설방음벽 : 자재비 손율(12개월) 적용

- 말뚝박기용천공(10m미만)

: 발전기 450kw → 200kw, 오거 74.6kw → 59.68kw

크레인(타이어) 25톤 → 10톤 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재 확인후 변경 계약

◦ 잔토처리는 사토장과 운반거리, 이동경로 설계서(설계도면, 공사시방서, 공종별 목적물 물량내역서 등) 지정

◦ 시공상세도 작성은 ‘건설공사 시공상세도 작성지침’에 의거 작성난이도에 따라 작성 목록 및 수량을 공사시방서에 표기하여 공사 발주

◦ 설계도면, 시방서, 자재수량 등 산출근거 미비한 공종은 보완후 변경 계약

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)