주요심사내용

□ 공 사 명 : 사천빗물펌프장 유입관로 신설공사

□ 사업개요

위 치	연희교차로(연희 임광아파트) ~ 사천교 인근 사천펌프장
공사개요	◦ 유입관로 설치: D = 3000mm, L = 937m ◦ 분기맨홀(B8 × W4.8 × H4.6m) 1개소
공사기간	2020. 6 ~ 2022. 6

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	20,013,830	천원
◦	심사금액	:	18,697,401	천원
◦	절 감 액	:	1,316,429	천원
◦	절 감 률	:	6.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 유류, 자재단가 등

- 휘발유: 1,408.3원/ℓ → 1,349.3원/ℓ(2020 4  서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 자재단가: ㄱ형강 등 16 나라장터 등 거래실례가격 적용

◦ 일위대가 조정

- 원심력 철근콘크리트관 부설 및 접합: 노무품 조정(품셈토목 5-6-1)

- 흄관절단: 노무품 조정(품셈토목 6-6-1)

- 하수관수밀시험: 노무품 조정(품셈토목 6-9-3)

- 강판절단: 아세틸렌 → LPG 적용(품셈기계 13-2-2)

- 몰탈: 노무품 조정(품셈건축 9-1-1)

- 주야간 할증 조정(△312,218천원)

: 선단조정TPS추진공, 활재주입공, 중압장치설비공, 비트교환, 조명시설, 환기시설 할증 제외

- 교통정리원 등 안전시설: 노무비 → 경비로 적용

- 흙운반/직상차(사토처리): 운반속도 조정(서울형 품셈)

- 차선도색: 주택가할증 제외(지세 반영된 품임)

- 말뚝박기천공(품셈공통 5-6-1)

․발전기: 450KW → 200KW

․풍화암 및 연암 천공 : 준비시간, 파일근입시간 제외(토사천공에 포함)

- 강재운반, 철근운반 : 운반속도 조정. 경비로 적용

- 보도용블럭포장: 모래운반 제외(현장도착도)

- 그라우팅천공 및 약액주입

: 서울형 품셈 적용, 풍화암 천공 준비시간 및 ROD 삽입시간 제외(△141,744천원)

◦ 제경비율 조정

- 이윤 : 15% → 12% 조정(△499,960천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정공법 선정 심의결과: 심의완료

○ 관급자재비, 이설비 등은 심사대상 제외

○ 각 공종별 운반비는 위치, 거리, 운반로를 시방서에 명시하여 발주

○ 분기맨홀 말뚝근입깊이(L=8m)는 근입깊이에 대한 재검토가 필요한 것으로 사료되므로 시공전 재검토하여 그 결과에 따라 정산이 필요함.