주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명: 상도근린공원 지하 공영주차장 건설공사-토목

□ 사업개요

위 치	관악구 봉천동 산 103-61
공사개요	흙막이 및 가시설 등 1식
공사기간	2023.11. ~ 2025. 6.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	4,438,884	천 원
◦심사금액:	4,048,713	천 원
◦조 정 액:	390,171	천 원
◦조 정 률:	8.79	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,436원/L → 1,622.5원/L (증20,136천 원)

- 외송각재: 718,562원/㎥ → 500,661원/㎥

- H형강: 1,250천원/톤 → 1,190천원/톤

- 고철: -290원/kg → -450원/kg

◦ 일위대가 조정

- 사토: 경비 항목 적용

- 말뚝박기천공: 발전기 규격 수정(서울형품셈)

- 말뚝박기천공: 천공시간 산출오류 수정(공통5-3-2) (감43,336천 원)

- 케이싱튜브설치및철거: 중복 제외(말뚝박기천공에 포함) (감26,284천 원)

- 볼트조이기: 서울형품셈 적용(감19,570천 원)

- 스티프너제작설치: 용접품 제외(H빔설치철거에 포함) (감8,580천 원)

- 어스앵커천공,그라우팅: 노무품 등 수정(공통5-1-5) (감36,632천 원)

- SGR천공: 서울형품셈 적용(감66,381천 원)

- 강재운반: 운반비 제외(현장도착도)

◦ 제비율 조정

- 건설기계대여대금지급보증발급금액: 요율(0.07%→0.4%) 조정 (증8,526천 원)

- 고용개선지원비: 보험료지원비 및 장려금 제외(자치구비대상) (감20,537천 원)

- 이윤: 요율(10%→15%) 조정 (증120,784천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)