주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서운로 일대 하수암거 신설공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	서초구 서운로 외 2개소
공사개요	하수암거 L=1,750m - 서운로1구간 ▣2.5×2.0 L=804m, 서운로2구간 ▣2.0×2.0 L=583m, - 교대역 인근 ▣3.0×2.0 L=233m, 논현2구간 2@▣1.2×1.2 L=130m
공사기간	2019. 10. 25. ~ 2021. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	15,172,764	천원(증액)
◦	심사금액	:	12,088,834	천원(증액)
◦	조 정 액	:	3,083,930	천원
◦	조 정 률	:	20.33	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정(’21.7월기준)

- 복공판(750×2000×200) : 440,000원/ea → 350,000원/ea

- 열연후판(12＜T≤20) : 1,410원/kg → 1,292원/kg

- 각재(외송) : 835,329원/㎥ → 366,660원/㎥

- 각재(미송) : 538,922원/㎥ → 490,354원/㎥

- 판재(외송) : 479,040원/㎥ → 419,040원/㎥

- 산소 : 2.5원/L → 1.91원/L

- 아세틸렌 : 16,000원/kg → 14,000원/kg

- 아스팔트유제(RSC-3,4) : 160,000원/드럼 → 126,000원/드럼

◦ 일위대가 조정

<전체공사>

- ‘보강철판설치,철거’ : 용접 길이 단위수량 오류 조정 (감794,851천원)

․ 용접길이 6m → 6m/30㎡(보강철판 A=30㎡, ㎡당 단가로 ㎡당 용접길이로 환산)

- ‘장비조립및해체, 관추진, 관접합부설’ : 노임할증 조정(지세할증 포함품)(토목 6-6-1, 6-7-4) (감579,463천원)

- ‘토사천공(φ105)’ 작업계수(f) 조정 (공통 5-5-1) (감62,519천원)

- ‘그라우팅’ 노무품 조정(공통 5-1-5) (감11,804천원)

- ‘강판구멍뚫기, 볼트조이기,풀기’ 서울형품셈 적용 (감81,099천원)

<상수관로 이설공사>

- ‘잔토처리,되메우기토운반,폐기물운반’ 적재시간 유류대 공제 (노무비→재료비) 적용, 지세할증 제외, 전체 경비항목 적용 (증3,737천원)

- ‘주철직관(이형관)부설, KP죠인트접합, 주철관절단, 중량구조물설치’ 표준시장단가 적용 (감13,513천원)

- ‘흄관절단’ 수량 제외(흄관접합부설에 포함)

- ‘H-PILE근입및박기’ 수량 제외, ‘말뚝박기천공’ 근입/항타 포함 작업시간 적용(공통5-3-2) (감4,942천원)

- ‘MAIN STRUT제작연결, JACK설치및철거’ 볼트연결품 제외(H빔설치철거품에 포함)

- ‘H빔설치및철거, 토류판설치및철거’ 등 표준시장단가 협의율 적용 제외 (증13,371천원)

- ‘조립식간이흙막이’ 노무품 조정 (감37,445천원)

- ‘교통안전시설 설치및철거, 경광등설치, 기존지장물매달기’ 전체 경비항목 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)