주요 심사내용

□ 공 사 명: 수락산 스포츠타운 조성공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	노원구 상계동 125 일대
공사개요	◦체육시설 설치: 축구장 1면, 야구장 1면, 테니스장 1면 등 ◦도로개설: 폭 10m, 연장 78m ◦관리동 및 여가녹지 등
공사기간	2011. 2. 2. ~ 2022. 2. 1.

□ 심사평가 결과

◦	설계변경금액(증)	:	238,190	천원
◦	심 사 금 액(증)	:	199,916	천원
◦	조 정 액	:	38,274	천원
◦	조 정 률	:	16.07	%

◦ 심사결과(계약심사요령 제6절)

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
	⦿

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 등 조정

- 정화조 맨홀뚜껑(D648mm): 400천원/조 → 264천원/조 (감140천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 공구손료: 재료비로 적용

- 국민·건강보험료 지원비, 고용개선 장려금 제외 (감34,635천원)

※ 건설혁신과-7979(‘21. 6. 28.) ’고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행매뉴얼 변경 시행‘ 참조

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견 없음.