주요 심사내용

□ 공 사 명 : 수락산 스포츠타운 조성공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	노원구 상계동 125일대
공사개요	◦체육시설 : 축구장(1면), 야구장(1면), 테니스장(3면), 관리동(1동) 및 여가녹지 공간 ◦도로개설 : 폭 10m, 연장 78m
공사기간	2021. 2. 2 ~ 2022. 2. 1.

□ 심사평가 결과

◦	요청금액	:	862,205	천원
◦	심사금액	:	852,301	천원
◦	절 감 액	:	9,904	천원
◦	절 감 률	:	1.15	%

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
	⦿

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 사토처리: 운반속도 조정(전용도로 적용)(감 7,488천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 해당없음