주요 심사내용

□ 공 사 명 : 용마배수지(4지) 내부방식공사

□ 사업개요

위 치	중랑구 면목동 산1-4(용마배수지)
공사개요	도막식 방수: 10,062㎡, 패널방수: 3,408㎡
공사기간	계약일로부터 180일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,271,951	천원
○	심사금액	:	2,150,720	천원
○	절 감 액	:	121,231	천원
○	절 감 률	:	5.34	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,468.4원/L, 경유 : 1,285.5원/L (2021년 5월 서울지역 대리점 가격) (감219원)

- 산소  : 2.7원/l → 1.91원/l 등 11개 품목 조정  (감2,212천원)

○ 일위대가

- 그라인딩 콘크리트면: 천정물량 구분, 노무품 조정(품셈건축9-2-1)(감57,783천원)

- 프라이머 도포: 노무품 조정(품셈건축6-1-2)(감1,755천원)

- SUP 패널식 방식: 노무품 조정(품셈건축3-2-3)(감1,973천원)

○ 제경비율

- 간접노무비: 12.7% → 13.8%(‘21.4.21 개정) (증5,566천원)

- 기타경비: 8.8% → 8.3%(‘21.4.21 개정) (감7,132천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 단면복구 및 보수공법 관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요