주요 심사내용

□ 공 사 명 : 우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사

□ 사업개요

위 치	서초구 서초동
공사개요	상수도관 부설 및 정비, D=200~2200mm L= 56m
공사기간	착공일로부터 100일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,416,877	천원
○	심사금액	:	1,325,800	천원
○	절 감 액	:	91,077	천원
○	절 감 률	:	6.43	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 각재 등 11종

- 각재(외송): 406.586원/㎡→366,660원/㎡ (감549천원)

○ 일위대가

- 토류판 설치 및 철거 : 노무품 조정(표준품셈 5-1-4) (감4,172천원)

- 하수도복구공 PVC100mm : 노무품 조정(표준품셈 6-4-1) (감577천원)

- 강판구멍뚫기 : 서울형품셈 적용 (감4,697천원)

- 볼트조이기 및 풀기 : 서울형품셈 적용 (감2,017천원)

- 말뚝박기 천공 : 장비 규격 변경(서울형품셈) (감10,775천원)

○ 제비율

- 산업안전보건관리비 :1.86% → 1.86%+5,349천원 (증4,417천원)

- 고용보험료 0.87%→1.01% (증111천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(적치장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 도로복구비 및 이설비 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)