주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	광나루 잠원수영장
공사개요	상수관로교체 3349m, 보도블록 정비 218@, 기타 1식
공사기간	2020.7.6. ~ 2021.5.31

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	579,015	천원(증액)
○	심사금액	:	579,015	천원(증액)
○	절 감 액	:	0	천원
○	절 감 률	:	0.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재 및 일위대가 등

- 발주처 설계가 적정

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)