주요 심사내용(총괄)

□ 사 업 명 : 개화산 가압장(2개소) 및 관로부설공사

□ 사업개요

○ 공사위치 : 개화동 432-8 ~ 개화동 산81-13

○ 공사목적 : 김포도시철도에서 발생되는 지하수를 개화천 및 개화산 근린공원 일대로 공급하여 생태복원

○ 규    모

- 가압장(9,000㎥/일) 2개소,

- 유입관로(D150~300mm) L=800m,

- 공기밸브 1개소, 분기밸브 1개소, 유량계실 2개소, 방류설 1식 등

○ 총공사비 : 29.1억원(도급비 22.2억원, 관급자재비 4.7억원,  이전비 2.2억원)

□ 심사평가 결과 : 절감액 145.7백만원 (6.6%)

[단위 :천원]

구 분	요청금액 (도급비)	심사금액 (도급비)	절 감 액	절감률
계	2,220,658	2,074,929	145,729	6.6%
토 목	1,989,746	1,852,834	136,912	6.9%
기계설비	230,912	222,095	8,817	3.8%

□ 현황도–가압장 2개소 및 관로부설(김포도시철도~개화산 일대)

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 개화산 가압장(2개소) 및 관로부설공사(토목)

□ 사업개요

위 치	개화동 432-8 ~ 개화동 산81-13(개화천 및 개화산 근린공원 일대)
공사개요	○ 가압장(9,000㎥/일) 2개소, ○ 유입관로(D150~300mm) L=800m, ○ 공기밸브 1개소, 분기밸브 1개소, 유량계실 2개소, 방류설 1식 등
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,989,746	천원
◦	심사금액	:	1,852,834	천원
◦	절 감 액	:	136,912	천원
◦	절 감 률	:	6.88	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 철못(N75,75x3.25M/M) : 1,375원/kg → 1,093원/kg

- 육각볼트(M22x70mm) : 586원/개 → 534원/개

- 보통시멘트(40kg) : 4,500원/대 → 3,473원/대

- 각재, 외송각재 : 389,221원/㎥ → 376,675원/㎥

- 비계파이프(2000×48.6×2.3mm) : 6,100원/본 → 5,400원/본

- 강관비계 부속철물(조임철물 등) : 1,600원/개 → 1,270원/개

- 구조용H형강(300x300x10x15M/M) : 850천원/톤 → 840천원/톤

- 꺽쇠 : 971원/개 → 300원/개

- PVC PIPE(VG1,D150mm) : 23,790원/m → 17,423원/m

- 도로용페인트(융착식, 백색) : 3,140원/kg → 2,750원/kg

- 스파이럴강관파일(457.2x6, 10ｍ) : 714천원/본 →  668천원/본

- PVC지수판(200x5T) : 2,900원/m → 2,500원/m

- 용접봉(스테인리스강용, 4.0㎜) : 13,080원/kg → 9,010원/kg

- 아세틸렌 : 11,500원/kg → 10,652원/kg

- 컨테이너(사무실 및 창고, 6.0×9.0M) :7,600천원/동 → 6,030천원/동

등 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 토사운반, 잔토처리

: 경비로 반영, 운반속도 조정, 적하시간 t3=0.8분 → 0.5분, 대기시간 10분초과로 재료비 공제, 덤프트럭 15톤 → 24톤 등

- 공구손료 : 경비 → 재료비로 반영

- 콘크리트타설(펌프차,무근 및 철근	`) : t3=30 0분/회 → 0분/회(이동 없음)

- 시공이음면정리(치핑) : 인력 → 기계(T=10cm) 적용

- 모르타르 배합 : 노무품 조정(품셈건축9-1-1)

- 콘크리트포장 : 노무품 조정(품셈토목1-6-1)

- 강재운반 : 운반거리 및 속도 등 조정

- 가설창고(컨테이너) : 품셈기준 조정(품셈공통2-3-2), 장비운반 제외(자주식)

- 보차도경계석 설치(150×150×1,000mm) : 품셈기준 조정(품셈토목1-10-3)

- 시멘트운반(40kg) : 운반속도 및 거리에 의한 운반비 산출

- 철근운반 : 운반속도 및 거리에 의한 운반비 산출

- 경량가시설 : 작업반장 제외(품셈공통 1-7-1)

- 안전휀스 설치 및 철거, 공사용안전등, 교통안전통제원 등 : 능률저하 제외

◦ 제경비율 조정

- 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 : 0.49% → 0.41%

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 심사결과 : 해당없음

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사설명서에 표기

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 개화산 가압장(2개소) 및 관로부설공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	강서구 개화동 432-8 ~ 개화동 산 81-13
개 요	○ 기계설비공사 - 수충격 방지설비 등 기자재 설치공사, 배관공사, 배관지지대설치공사 등
기 간	착공일로부터 12개월

□ 심사결과 – 관급자재 심사제외

◦ 설계금액  : 230,912천원

◦ 심사금액  : 222,095천원

◦ 절 감 액  :     8,817천원

◦ 절 감 률  :     3.82%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 배관용스테인리스강관 등 62종

- 배관용스테인리스강관(Φ200×4mm)/m : 77,690원 → 70,006원(감 7,684원)

- 게이트밸브(Φ200×0.98MPa, 주철)/개 : 441,000원 → 388,080원(감 52,920원)

◦ 일위대가 조정 : 잡철물 제작설치 등 2종

- 잡철물 제작설치 : 보통 설치 →  간단 설치

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음