주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 중랑천 차집관로 성능개선공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	중랑천(녹천교~창동교간, 도봉구 창동756-43~21-1번지)
공사개요	- D=1,800mm, L=600m - 아스콘포장 10.9a, 가시설(흙막이) 600m, 사각맨홀 등
공사기간	2020.4. 1 ~ 2020.10.30

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	661,734	천원(증액)
○	심사금액	:	608,674	천원(증액)
○	절 감 액	:	53,060	천원
○	절 감 률	:	8.0	%

□ 주요 심사내용(안)

○ 일위대가 등

- 관목운반 : 적재시 10분 초과에 따른 재료비 공제

- 마카덤 롤러 자주식 : 표준품셈(8-4-2) 적용 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된

사항은 수정(보완)된 설계서로 변경 계약