주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 한강공원 하천시설물 유지관리 및 개선공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	한강공원 전구간
공사개요	도로포장 26a, 호안블럭설치 150㎡ 등
공사기간	2022.02.~12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,366,739	천원
○	심사금액	:	1,349,740	천원
○	절 감 액	:	16,999	천원
○	절 감 률	:	1.24	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 시멘트 등 8종

- 시멘트 : 131원/Kg → 125원/Kg (감440천원)

○ 일위대가

- 그라인딩 : 노무품 조정(표준품셈 9-2-1) (감1,467천원)

- 몰탈(1:2) : 노무품 조정(표준품셈 9-1-1) (감2,051천원)

○ 제비율

- 산업안전보건관리비 : 수식 오류 수정 (증6,048천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)