주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가계약, 설계변경)

□ 사업개요

위 치	강서, 양천, 구로구 일대
공사개요	- 누수 복구 1,100개소 - 불용관 정비 510개소
공사기간	2021.6.7.~2022.6.30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,205,691	천원
○	심사금액	:	2,188,853	천원
○	절 감 액	:	16,838	천원
○	절 감 률	:	0.76	%

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
	⦿

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 및 일위대가 조정

- 라인스토핑 기계경비 조정(서울시 견적가) (감15,320천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 해당 없음