주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울 내곡 공공주택지구 지구외 도로 건설공사

□ 사업개요

위 치	서초구 양재동, 신원동, 원지동, 염곡동 일원
공사개요	- 도로개설 폭2.5m~20.7m 연장 2,609m - 교량 6개소
공사기간	2018. 11. ∼ 2020. 12.

□ 심사평가 결과

구 분	설계금액(천원)	심사금액(천원)	절감액(천원)	절감율(%)
총 괄	18,610,440	16,576,654	2,033,786	10.9
토 목	18,356,277	16,323,400	2,032,877	11.1
조 경	254,163	253,254	909	0.4

【 토  목 】

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 이동식 축중기 등 24개 자재단가 수정

◦ 일위대가 조정

- 하수관 천공 및 접합 : 표준품셈 적용(16-2-5)

- 제수변 기계 부설(게이트밸브) : 표준품셈 적용(16-3-1)

- 보도블럭(철거), 콘크리트 천공, 강판구멍뚫기 : 서울형 품셈 적용 등

◦ 중기산출 조정

- 동력분무기 주연료 : 휘발유 7.5→1.5L(표준품셈 9-3)

- 볼라드 설치 : 표준품셈 적용(10-6-1)

- 줄눈 설치 : 표준품셈 적용(10-3-2)

- H-pile 천공 : 표준품셈 적용(5-6-1)

- 강관말뚝 두부정리 : 표준품셈 적용(5-4-2)

- 복합말뚝박기 : 표준품셈 적용(5-4-1)

- 시트파일 뽑기 ; 표준품셈 적용(8-29) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(순쌓기 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

【 조 경 】

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 등 조정 (※ 직접공사비 기준)

- 소나무 식재(R20) : 식재품 조정(표준품셈 적용)              [감86천원]

- 소나무 식재(R25) : 식재품 조정(표준품셈 적용)             [감89천원]

- 맥문동 식재 : 자재 할증 조정(10%→서울시 기준 3% 적용)  [감121천원]

- 맥문동 식재 : 식재품 조정(보통→양호)                      [감249천원]

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음