주요 심사내용

□ 공 사 명 : 신림4배수분구 하수관로 종합정비 -설계변경

□ 사업개요

위 치	관악구 신사동 외 3개동 일대
공사개요	- 하수관로 개량 D450~1,200mm, L=6,556m
공사기간	- 2019.04.15.~2020.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	요청금액	:	804,436	천원
◦	심사금액	:	804,436	천원
◦	절 감 액	:	0	천원
◦	절 감 률	:	0.0	%

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
⦿

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가, 일위대가 등

- 금번 설계변경 추가 부분은 당초 계약물량의 증감으로 단가 산정은

시공사와 발주청에서 기존 계약단가를 적용하는 것으로 합의되어 조정사항 없음

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 해당없음

○ 관급자재비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재 확인후 변경 계약