주요 심사내역

□ 용 역 명: 강동 일반산업단지 건설폐기물(파쇄) 처리용역

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치: 서울시 강동구 상일동 404번지 일원 ◦ 용역개요 - 건설폐기물( 총33,834.2톤) ㆍ폐콘크리트: 17,806.3톤 ㆍ폐 아 스 콘: 2,970톤 ㆍ혼합폐기물 : 10,950톤 ㆍ건설폐토석 : 9,120톤 ◦ 용역기간 : 착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,823,360	천원
◦	심사금액	:	1,667,488	천원
◦	조 정 액	:	155,872	천원
◦	조 정 률	:	8.55	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,424.8원/ℓ, 휘발유: 1,580.5원/ℓ(한국석유공사 2월 발표자료)

등 4종 거래실례가격 적용 (증 4,974천원)

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 덤프트럭운반  (감 123,664천원)

ㆍ왕복시간(t2) : 운반거리 및 속도 조정(최단시간)

ㆍ적하시간(t3) : 0.8분(보통) ➝ 0.5분(양호)

ㆍ적재장소 진입시간(t4) : 0.7분(보통) ➝ 0.15분(양호)

- 철근가공조립(간단): 노무품 조정(품셈공통6-2-2,3) (감 93천원)

- 혼합건설폐재류(소각5%미만)

: 65,072원/톤 ➝ 65,000원/톤(서울시 견적가)  (감 348천원)

◦ 기타 사항

- 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

- 운반비 산정의 기준이 되는 다음 사항을 설계서(도면, 과업내용서, 물량내역서, 현장설명서)에 구체적으로 명기하여 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 않도록 하여야 함

1) 토사채취, 사토 및 폐기물처리 등을 위한 위치

2) 공사현장과 “1)”에 따른 위치간의 운반거리, 운반로 및 운반속도 등

3) 기타 운반비 산정에 필요한 사항.  끝.